문서번호	시설과-2380
결재일자	2016.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설과장
이강호		代이강호	04/13 공헌구
협 조

서울대공원 제1펌프장 옥상 보수공사 실정 검토 보고서(제 1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

서울대공원

(시설과)

『서울대공원 제1펌프장 옥상 보수공사』

실정 검토보고서(제1차)

『서울대공원 제1펌프장 옥상 보수공사』에 대하여 시공자가 제출한 실정보고 사항에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고 드림

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울대공원 제1펌프장 옥상 보수공사

□ 공사기간 : 2016. 4. 1 ~ 2016. 5. 30

□ 시 공 자 : ㈜웅산건설산업 대표 김 규 태

□ 도 급 비 : 금81,183,230원

□ 주요 공사내용

○ 옥상바닥 무근콘크리트 철거 및 레미콘 타설

○ 옥상 우레탄 방수공사

○ 옥상바닥 아스팔트 도포

○ 내·외부 노후 출입문 교체

○ 내부벽체 및 천정 도장공사

○ 외벽 일부 미장들뜸 부분 철거 및 미장 작업

○ 외벽 콘크리트부분 도장

○ 내부 바닥 배수트렌치 철거 및 설치 등

2		보 고 사 항

○ 옥상바닥 100mm 발포폴리스티렌(단열재)설치공정 제외 - 시공사 실정보고

3		변경사항 검토

□ 검토사항

(단위 : 천원)

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견	소요예산 (개략금액)
∘ 수장공사	∘ 옥상바닥 철거 결과 기존에 단열재가 설치되지 않았고, 단열재를 설치할 경우 콘크리트와 이질재로 재료의 일체화 되지 않아 방수하자의 원인이 될 수 있다는 시공자 의견	∘ 펌프장은 직원이 상주하고 있지 않는 시설물이고, 단열재를 설치할 경우 방수하자가 예상되므로 공종에서 제외하는 것이 적정할 것으로 판단 됨	감 5,140
도 급 비			감 5,140

4		예 산 현 황

□ 사업비 변경

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액	제1차 실정보고	비 고
서울대공원 제1펌프장 옥상 보수공사	도급금액	81,183,230	76,043,230	감 5,140,000

5		조 치 의 견

□ 위와 시공자에게 선 시공 지시하고 추후 준공시 정산 처리코자 함

붙임 : 시공사 실정보고 공문 1부. 끝.