	강동소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	강동소방서 고덕119안전센터 재건축 공사 설계변경 계약 요청

1. 관련근거

가. 서울시 재무과-43731(2015.9.2.)호 “공사계약 체결 통보(고덕119안전센터 신축공사”

나. 강동소방서 소방행정과-4465(2016.4.12.)호 “고덕119안전센터 재건축 공사 설계변경 실정보고”

2. 우리 서 고덕119안전센터 재건축 공사 진행 중 현장여건 변동 및 설계누락 부분의 설계변경에 대하여 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : **********************

나. 계약금액 : *********************************

다. 계약업체 : ****************

라. 계약기간 : *******************************

마. 설계변경 요청 사항

계약금액			계약기간	변경사유
변경 전	변경 후	증	변동사항 없음	붙임 내역 참조 (낙찰율 적용금액)
997,899,560원	1,109,344,238원	111,444,676원

붙 임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 도서 및 평판재하 시험 보고서(용량초과로 별도송부) 1부.

4. 공사계약체결 통보서 사본 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기범		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	전결 04/13 손문종
협조자
시행	소방행정과-4468	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	부분공개(7)