문서번호	시설과-2404
결재일자	2016.4.14.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
박도원	조대복		공헌구		심상원		04/14 송천헌
협 조
	동물원장					이기섭
	전략기획실장					代강준민
	동물기획과장					이종혁
	동물복지1과장					이달주
	동물복지2과장					김태원

동물사 실내공기질 개선공사 설계용역 추진계획(안)
『 동물원 내 관람장 및 사육환경 개선을 위한』 실내공기질 개선공사 설계용역 추진계획(안)

2016년 4월

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『 동물원 내 관람장 및 사육환경 개선을 위한』

실내공기질 개선공사 설계용역 추진계획(안)

동물원 내 건물별 공기정화설비, 환기설비시스템을 개선하여, 관람객과 직원들의 건강 보호와 환경상의 위해를 예방하고 동물들의 각종 호흡기 질환을 예방하고자 함.

※ 2016년 업무보고 시 관람장 냄새 및 분진 대책 강구(원장님 지시사항)

Ⅰ		용역의 필요성

□ 관련법규

○ 공기질 관련 법규로는 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」이 있으나,

동물원은 실내공기질 의무 다중이용시설에서 제외

□ 용역의 필요성

○ 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」의무대상 시설과 동등한 실내공기질 조성으로 사람과 동물에게 쾌적한 관람·사육환경을 제공하기 위하여 동물사별 적합한 공조 및 환기시스템 개선에 대한 설계용역 필요

- 관람장 내 동물사 냄새 유입으로 관람이 힘든 동물사가 다수 존재함.

Ⅱ		동물사 환기시스템 점검현황

□ 대상건물: 유인원관 외 15개동(관람장 있는 모든 건물)

※ 해양관, 야행관 등 리모델링 공사 대상 건물 제외

□ 점 검 자: 기계화공팀 조대복 팀장 외 5명

□ 점검기간: 2016. 2. 15. ~ 3. 14.(1개월)

□ 점검내용: 붙임 동물사 환기시스템 점검현황 참조

○ 건물별 공기조화기 및 환기시스템 정밀 점검

□ 점검결과 문제점

○ 노후화된 설비와 설비용량 부족으로 급기·배기량 부족

○ 겨울철 에너지 손실을 우려한 환기 횟수 최소화 및 폐쇄 운전

Ⅲ		설계용역 추진계획

□ 설계용역 범위: 실시설계 용역

□ 용역개요

○ 용 역 명: 동물원 실내공기질 개선공사 실시설계 용역

○ 용 역 비: 20,460천원

○ 사업기간: 2016. 5. ~ 2016. 7. (착수일로부터 90일간)

○ 대상건물: 유인원관 외 15개동

○ 용역내용

- 건물별 공조 및 환기시스템 현장 조사 및 문제점 분석

- 건물별 공조 및 환기시스템 비교 분석 및 공사비 산출

- 건물별 환기 및 분진처리 시스템 실시설계

○ 예산과목: 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비(401-01)

□ 계약방법: 수의계약

□ 입찰참가자격: 엔지니어링산업진흥법 제21조의 따른 엔지니어링사업(설비) 또는 기술사법 제6조에 따른 건설부문(건축기계설비) 신고를 필한 업체

Ⅳ		공사 추진계획

□ 2017년도 중장기 시설사업으로 추진

□ 실시설계 결과물을 토대로 긴급으로 개선할 시설물은 2016년 집행 잔액 및 추경사업에 반영하여 우선적으로 추진

Ⅴ		기대효과

□ 실내공기질 개선으로 사람과 동물의 건강을 보호하고 환경상의 위해 예방

□ 관람장 냄새 제거로 쾌적한 관람환경 조성

□ 냉·난방 에너지 손실을 줄여 공공요금 절감에 기여

Ⅵ		추진일정

○ 2016. 4.  기술용역 타당성심사 요청, 설계용역 발주 및 착수

○ 2016. 5.  동물사별 공조기 및 환기시스템 정밀 조사

○ 2016. 6 ~ 7.  실시설계 작성 및 설계용역 완료

○ 2016. 7.  전문가 자문회의 개최

○ 2016. 8.   2017년 중장기 시설개선사업에 반영.  끝.

붙임  동물사 환기시스템 점검 현황 1부.  끝.