문서번호	시설과-2401
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
이강호	공헌구	심상원	04/14 송천헌
협 조
	총무과장		이경로
	주무관		심상운
	주무관		이상국

서울대공원 기린나라 정밀점검 용역

결과 및 조치계획 보고(안)

2016.  4.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울대공원 기린나라 정밀점검 용역 결과 및 조치계획 보고(안)

공원 내 시설물의안전관리에관한 특별법에 의거 2종 시설물인 기린나라에 대하여 정밀점검 용역을 시행하고 점검결과 및 조치계획에 대하여 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 서울대공원 기린나라 정밀점검 용역

□ 용 역 자 : ㈜창민우구조콘설탄트 대표 김 종 호

□ 용역금액 : 금9,580,000원

□ 용역기간 : ‘16. 3. 2. ~ ’16. 4. 2.

□ 시설물 현황 및 평가등급

시설명	위 치	층 수 (지하/지상)	연 면 적 (㎡)	구 조	준공일자	평가등급	비고
기린나라	과천시 광명로 140	1/3	6,597.70	RC 및 철골조	2000. 6. 30	B

Ⅱ		점 검 내 용

□ 외관조사 및 구조체 주요 결함 사항 조사

□ 콘크리트 압축강도 조사

□ 부재 규격조사 및 콘크리트 탄산화 시험

□ 기울기 및 침하조사

□ 보수·보강 및 유지관리 방안 제시 등

Ⅲ		점 검 의 견

□ 시설물에 대한 정밀점검 결과 구조적으로 큰 문제가 될 만한 결함은       조사되지 않았으나

□ 콘크리트 및 철골의 재료적 특성에 의한 건조수축, 온도변화 등의 요인   으로 벽체와 슬라브 균열, 누수 및 백화 발생, 천정 철골도장 박락 등의  노후화가 일부 조사 되었음

□ 따라서 유지관리 측면에서 조사된 결함에 대하여 제시된 보수방법으로  보수가 필요하다고 판단 됨

□ 결함내용 및 보수방안

(단위 : 천원)

구 분	손상내용	보수 물량	보수방안	공사금액	공사우선순위
기린나라	콘크리트 균열보수	39m	에폭시 실링제	1,283	1순위
	누수균열 보수	10m	발포우레탄 수지	578	1순위
	조적균열 보수	61m	탄성에폭시 실링제	1,273	2순위
	철골 도장	818㎡	조합페인트 도장	11,482	3순위
	가 시설물 설치	2,585㎡	내부 비계설치	39,777	3순위
	제 경비			31,750
	계			86,143

Ⅳ		문제점 및 검토결과

□ 문제점

○ 기린나라는 위탁시설물로서 공사기간(약 45일)동안 폐장이 어려우므로

천정 철골도장을 위한 내부에 가 시설물(비계) 설치 불가

○ 공사는 관람객 많은 시기를 피해 시행

□ 검토결과

○ 1~2순위 콘크리트·조적균열 및 누수균열 공사는 관람객이 적은 5~6         월경 실시(운영자와 협의 완료)

○ 내부천정 철골 도장공사는 시설물 폐장이 어렵고, 내부에 가 시설물   (비계)설치가 불가할 경우, 작업자가 20m 이상 높이에서 줄을 타고   작업을 해야하므로 안전사고 발생 위험이 있고, 공사우선 순위가 3순위이므로 추후 공사가 가능한 시기에 시행하는 것이 적정할 것으로 판단 됨

Ⅴ		조 치 의 견

□ 위와 같이 정밀점검에 다른 지적사항에 대하여 보수공사를 실시하여  관람객 안전 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 정밀점검 보고서 1부. 끝.