문서번호	설비부-5745
결재일자	2016.4.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		代이호기	04/14 권오식
협조

『인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사』

설계변경 검토 보고

『인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사(2차)』 와 관련하여 설계변경 시행하고자 아래와 같이 검토하고 보고 드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사(2차)

□ 공사규모 : 서울혁신파크 8동 리모델링(지하1층, 지상1·2·4층)

□ 공사기간 : 2016.01.20 ～ 2016.04.15.(총차 - ‘15.11.13∼’16.4.15)

□ 공사금액 : 307,081,795원(총차- 320,081,795원)

□ 시 공 사 : 광성피앤드씨(주)  대표 최종현

추진 경위

□ 2016.03.18. : 소방감리원 실정보고(SW-감-16-03-1101)

□ 2016.03.24. : 기계분야 시공사 실정보고(광피2016-06)

□ 2016.04.11. : 설계변경 소위원회 자문 개최

□ 2016.04.12. : 설계변경 소위원회 자문내용 조치결과 보고(광피2016-09)

검토 내용

□  설계변경 소위원회 자문내용 조치 결과

(단위:원)

심의요청 금액	심의결과 조정금액	증∙감
380,941,000	375,329,690	감)5,611,310

공사비 변경 내용

(단위:원)

구분	당 초	변 경	증감	비고
총차	320,081,795	388,284,600	증 68,202,805
1차	13,000,000	12,954,910	감 45,090	‘16.1.26 준공 (제경비 정산)
2차	307,081,795	375,329,690	증 68,247,895

보고자 조치의견

□ 운영부서 요구사항 반영으로 공사물량 증가되어 설계변경 필요한 사안으로, 설계변경 소위원회 자문의견 반영 결과보고를 검토한 결과 적합하여 건설총괄부에 설계변경 의뢰 하고자 합니다.

붙임  1. 심의결과 보고(시공사) 1부.

2. 설계변경 내역서(총차, 2차) 각 1부. 끝.