투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사 설계변경 계약의뢰(총차, 2차)

1. 설비부-5745(2016.04.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경 요청하니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사

나. 계약금액 : 총차 320,081,795원(2차: 307,081,795원)

다. 공사기간 : 총차‘15.11.13.~‘16.04.15.(2차:‘16.01.20.~‘16.04.15.)

라. 계 약 자 : 광성피앤드씨(주) 대표자 최종현

마. 계약변경 내용

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증·감	비고
	당초	변경
총 차	320,081,795	388,284,600	증 68,202,805	공사기간 변경없음
2 차	307,081,795	375,329,690	증 68,247,895

바. 예산과목 : 인생이모작지원과, 인생이모작지원 기반마련, 은퇴 후 제2인생

설계지원, 50+캠퍼스 확충,시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 도서(총차, 2차) 각 1부.

3. 합의서(총차, 2차) 각 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	代이호기		설비부장	04/14 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-5804	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)