문서번호	시설관리과-7474
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장
김효수	04/14 남정열
협 조	주무관		윤기영
	주무관		함인석

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 강동구 관내

학교 아리수 음수대 설치사업 시행보고

2016. 04. 14

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 강동구 관내

학교 아리수 음수대 설치사업 시행보고

학생들이 수돗물을 깨끗하고 안전한 아리수를 마실 수 있는 음용환경을 제공하고자 시행하고 있는 아리수 음수대 설치사업과 관련하여 2016년 강동구 관내 음수대 설치대상으로 선정된 학교 및 공공기관에 대한 급수시설 개선사업을 추진하고자 보고 함.

Ⅰ		추진 대상

□ 추진근거

○ 급수설비과-3166(‘16.04.05) : 2016년 아리수 음수대 내부배관 예산요청                               및 발주 현황 보고

○ 시설관리과-7414(‘16.04.12) : 2016년 아리수 음수대 신설(추가)                               설치공사에 소요되는 예산 보고

□ 음수대 설치대상 현황(신설,추가)

구 분		계	학 교				관공서	비 고
			초	중	고	유치원
강 동 구	개소	14	4	3	2	1	4
	수량	77	19	18	19	7	14

○ 예산현황 : 150백만원

Ⅱ		보고내용

□ 문제점

○ 음수대 설치에 따른 배관공사시 업종별 업무내용에 따라 분리발주 필요

- 전문공사업종 기계설비공사업은 건축물의 급배수ㆍ배관설비 업종에 해당되고, 상하수도설비공사업은 상수도관설치공사(옥내급배수설비제외)로 건설사업기본법에 명시되어 있어 업종에 따른 분리발주 필요

○ 소음 및 분진발생으로 수업에 지장을 초래하여 여름방학 기간내 공사 완료

- 학교측에서의 방학기간을 활용한 공사요구

- 서울시 초ㆍ중ㆍ고 여름방학 : 30여일(2016. 7월 ~ 8월)

○ 기계설비 업체가 대부분 영세하고, 지역별 공사 대상지가 분산되어 있어 공사관리에 어려움이 있음.

□ 대 책

○ 옥내설비공사는 기계설비공사업으로 별도 발주하고, 옥외 배관공사는 관내 년간단가계약 업체에서 추진

○ 방학기간내 공사완료 및 업체 시공능력을 감안하여 지역별 옥내배관공사 분리발주

Ⅲ		추진계획

□ 공사 추진계획                                 (단위 : 백만원)

연번	공 사 명	옥내 공사개요		옥외 (m)	공사비	음수대 수량	담당자	비 고
		구경 (㎜)	연장 (m)
	계	13~30	656	136	90	77
1	강명초등학교외6개소 학교급수시설 개선공사	15~25	334	16	43	52	윤기영
2	선린초등학교외6개소 학교급수시설 개선공사	15~30	322	120	47	25	함인석

○ 옥외배관 부설공사

- 시공방법 : 학교당 옥외공사 금액(도급액)이 2,000만원 미만일 경우 옥외공사는 급수공사 년간단가계약업체(상하수도설비업)에 지시하여 시공

- 공사(옥외) 범위 : 수도계량기 ~ 건물입구 까지(필요시)

- 공사개요 : D=25~30㎜, L=136m

- 소요예산 : 18,000천원

○ 옥내배관 설비공사

- 시공방법 : 2건으로 분리 공사시행 및 감독

- 공사개요 : D=15~30㎜, L=656m

- 소요예산 : 72백만원

○ 음수대 구매

- 구매방법 및 설치 : 상수도사업본부(급수설비과) 음수대 일괄구매 및 설치

Ⅳ		행정사항

□ 옥내배관공사 추진일정

○ 현장조사, 설계 및 발주 : 2016.04 ~ 05월

○ 공사시행               : 2016.06 ~ 07월

○ 준공처리               : 2016.08 ~ 09월

※ 음수대 설치 후 정상출수 확인시 준공

□ 담당자별 조치사항

○ 공사시행 전 음수대 설치 대상기관에 대한 “아리수음수대 관리를 위한 협약서” 징취

○ 옥내배관 및 음수대 현장 설치 시 검사이행

○ 음수대 통수 시 수질팀 수질검사 의뢰

○ 음수대 설치 완료 후 GIS 현장자료 입력 및 대상기관에 물품관리전환 실시(물품관리전환합의서, 음수대관리카드, 음수대관리매뉴얼을 대상기관에 송부) 등

붙임 : 1) 2016년 음수대 설치 발주현황 1부.

2) 아리수음수대 설치신청서 및 관리협약서 1부.

3) 아리수음수대 설치사업 설계요령 1부.

4) 음수대 배관자재 인증현황 1부.

5) 물품관리전환합의서 및 음수대관리카드 각 1부.

6) 음수대관리 매뉴얼 1부.

7) 2016년 아리수음수대 일위대가 1부.  끝.