문서번호	시설보수과-1536
결재일자	2016.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	04/14 이종엽
협 조

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

성동도로사업소

(시설보수과)

감독기관의 검토보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사]

‘시조사삼거리 교차로구간 개선공사’를 수행함에 있어 현황 및 문제점에 대한 감독기관의 검토보고서 제출에 따른 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사

공사기간 : 2014.12.18.~2016.06.30.

도 급 비 : 3,688,190,000원

도 급 자 : ㈜특수건설  대표 김중헌

공사개요 : 차도확장 – B=3.0m, L=206m

(고가차도 성능개선 1개소, 보도육교 철거 1개소 포함)

Ⅱ		현황 및 문제점

낙석방지책 높이 및 설치연장 증가

[한국철도공사수도권동부본부 요청사항 : 시설처-2061(2016.03.31.)]

- 철도의 건설기준에 관한 규정에 의거 높이 3m 이상 높이의 투척방지용 안전막 등 설치토록 되어 있고 철도 사면의 상부까지 연장 요청[설계는 2.1m로 고가 연장(29.4mX2=58.8m)만 설치하는 것으로 되어 있음]

교대부 보수.보강을 위한 현장근로자 작업장 출입을 위한 가설계단 설치 필요

Ⅲ		감독기관 검토의견

철도의 건설기준에 관한 규정에 따라 높이 변경하고, 교대부까지 낙석방지책 연장설치 및 하부지주에 투척방지방 설치(안전사고 예방)

원활한 공사수행을 위하여 가설계단 반영

개략공사비 : 약 65,295천원 증

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 공사 감독기관의 검토보고 사항에 대하여 검토한 바, 관련기관(한국철도공사) 요청사항 및 안전사고 예방과 공사수행을 위하여 감독기관의 검토의견과 같이 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

다만, 공사비 증액은 금년도에 기확보한 예산범위 내에서 집행이 가능한 실정이므로, 예산 현황 및 설계변경 증·감사항, 현장여건에 대한 면밀한 검토후 낙석방지책 연장 시공 가능여부를 추가 검토하도록 조치하고,

공사비는 실 시공물량에 맞춰 정산 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  감독기관 검토보고 및 관련 공문 1부. 끝.