문서번호	도로시설과-4458
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장		안전총괄관
박용화	이앙식	송상영		04/15 이택근
협 조	기전시설팀장		김호성
	시설기술팀장		이상호

『방화대교 남단 접속도로 건설공사 관련』

시설물 인계․인수 검토보고

2016.04

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울시설공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

방화대교 남단 접속도로 건설공사 관련

「시설물 인계․인수」 추진 보고

우리시 도시기반시설본부에서 시행한「방화대교 남단 접속도로 건설공사」와 관련하여 공사구간 내 설치된 시설물(도로, 도로부속시설물 등)에 대한 인계인수 추진 보고임.

Ⅰ. 추진개요

❍ 사업개요

- 사 업 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

- 공사구간 : 강서구 방화동 방화대로~올림픽대로

- 공사규모 : 도로개설 L=3,021m(토공 1,316m, 교량 756m, 터널 949m)

- 공사기간 : 2005.10.05 ~ 2016.01.29

- 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부

- 시공/감리 : 금광기업(주) 외 1개사/(주)삼보기술단

- 전체 평면도(도로시설과 인수대상 구간)

❍ 인수시설현황

- 인계/인수 : 도시기반시설본부 토목부/안전총괄본부 도로시설과(시설관리공단)

- 시설물 현황 : 도로 등 70종 시설물(붙임 1)

시설구분	공정수	주요공정	비고
총 계	70
도 로	3	아스콘 포장, 콘크리트 포장, LMC 포장
도로시설물	2	NATM 터널, ST.BOX
도로부속물	19	충격흡수시설, 방음벽, 경계석 등
교통관리시설	2	차선, 도로표지
교통안전시설	1	교통표지판
교통안전 도로부속물	4	도로안전분리대, 차선규제봉, 도로표지병 등
조경시설	16	잔디식재, 법면보호블럭, 수목 등
기전시설	23	조명등, 가로등, 점검등, CCTV, 피난유도등 등

Ⅱ. 추진경위

❍ ‘15.09.15. : 관련기관 합동점검(1회차)

❍ ‘15.12.02. : 시설물별 인수기관 지정

❍ ‘15.12.04. : 관련기관 합동점검(2회차)

❍ ‘15.12.16. : 합동점검 지적사항 알림(도로시설과→도시기반시설본부)

❍ ‘16.01.26. : 지적사항 조치결과 알림(도시기반시설본부→도로시설과)

❍ ‘16.03.10. : 인수인계 요청

Ⅲ. 지적사항 및 조치결과

❍ 지적사항 조치결과

분야	지적사항			비고
	총계	조치	미조치
총계	44	39	5
도로부속물 및 포장	10	9	1
구조물	16	14	2
기전	15	13	2
녹지	3	3	-

❍ 미조치 사유

지적사항	미조치 사유
◦ 본선과 램프의 단차해소	◦ 올림픽대로 확장공사시 기 설치된 램프교량으로 인하여 발생된 단차로 해소곤란
◦ 구교와 신교의 받침배치가 상이하여 종방향신축이음 파손 우려	◦ 설계시 곡선교 시공 및 주행성을 고려하여 신축이음장치를 반영한 사항으로 조치 곤란
◦ 교대 측방이동 계측점 설치	◦ 설계 미반영 사항으로 조치 곤란
◦ 옥외 전기실 케노피 설치	◦ 설계 미반영 사항으로 조치 곤란
◦ 전기·통신선로에 덮개 등 방수처리 필요	◦ 설계 미반영 사항으로 조치 곤란

❍ 현장사진(주요 미조치 사항)

올림픽대로와 램프의 단차 발생	구교·신교 받침배치 상이로 신축이음 파손 우려

❍ 검토의견

- 올림픽대로 본선과 진출 램프의 단차발생

• 방화대교 남단 접속도로 개설공사(시행청 도시기반시설본부)와 올림픽대로 확장공사(시행청 서울지방국토관리청) 현장이 중첩되어 램프시설물과 올림픽대로 본선간 단차 발생

- 종방향 신축이음 파손 우려

• 올림픽대로와 연결되는 램프시설물(구교) 설치 후 방화대교~방화로를 연결하는 방안이 결정되면서 연결교량의 확장이 요구됨에 따라 추가 램프시설물(신교) 설치

- 기타 지적사항

• 당초 설계 미반영 사항

Ⅲ. 조치의견

❍ 올림픽대로 본선과 진출 램프의 단차발생

- 단차 제거 등 근본적인 해소가 어렵고 차량의 이탈을 방지할 수 있도록 방호울타리 설치 및 차선 개선 등이 요구됨.

- 차로 이탈시 전복사고 위험이 있으며 단차발생의 원인자 규명 및 보완 요청시 지적사항 해소에 상당한 기일이 경과될 것으로 예상되므로

- 안전사고 위험을 최소화 하기 위하여 시설관리공단에서 조속히 대책을 마련하여 사고위험을 해소토록 추진하는 것 타당함.

❍ 종방향 신축이음 파손 우려

- 구교와 신교의 받침배치가 각각 고정단과 가동단으로 상이하게 설치됨에 따라 신축거동시 탄성봉함재 계열의 종방향 신축이음의 잦은 파손이 우려되나

- 해당 구간은 곡선교 구간으로 강재 계열의 신축이음 장치 설치시 시설물 파손 우려를 고려하여 탄성봉함재 계열을 적용한 사항으로 현재 추가적인 보완이 곤란한 실정임

❍ 설계 미반영(3건)

- 준공시점으로 조치가 곤란함에 따라 향후 유지관리 예산과 현장여건을 고려하여 해소

❍ 상기 미조치 사항(5건)은 단기적 해결이 어려운 사안으로 우선 인계․인수하여 업무 공백을 최소화하고 추후 현장 여건을 보아 면밀 검토후 해소토록 함이 타당하다고 사료됨

Ⅳ. 향후계획

❍ 2016.04.15. : 인수인계 시행 알림(도로시설과→시설관리공단)

❍ 2016.04.     : 인수인계 실시(도시기반시설본부→시설관리공단)

붙임 : 1. 인수 대상시설물 현황

2. 시설물 인계인수서 1부.  끝.