문서번호	재난대응과-7869
결재일자	2016.4.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	대응전략팀장	재난대응과장		소방재난본부장
강병욱	이창식	김학준		04/15 권순경
협 조	경리팀장		권오덕
	담당자		최종민

2016년 소방용수시설 도색·보온 공사계획

2016. 4

서울소방재난본부

(재난대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 소방용수시설 도색·보온 공사계획

소방용수시설의 효율적인 유지·관리를 위한 소화전 도색 및 보온 공사 계획임.

Ⅰ				관련근거

○ 재난대응과 - 2847호『2016년 소방용수시설 관리운용 기본 계획』

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조(단가계약)

Ⅱ				사업개요

○ 사업명 : 2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사

○ 수  량 : 6,241개소(도색 4,471개소, 보온 1,770개소)

※ 도색 4,471개소(지상 1,450, 지하 3,018, 급수탑3) / 보온 1,770개소(지하)

○ 예  산 : 190,000천원(금 일억구천만원정)

※ 소방용수시설 등의 설치 및 관리 / 소방용수시설 보수 / 시설비(214-401-01)

Ⅲ				사업개선

○ 현 실태

- 2015년 제한경쟁입찰(본부계약) 도색·보온 공사 추진

※ 최근 3년간 도색·보온 현황

연 도	소방용수시설 보온 및 도색
	예 산(천원)	수 량(개소)	계 약 방 법
2015	180,000	6,476	제한경쟁입찰(일괄)
2014	210,000	8,019	“
2013	220,000	8,000	“

○ 2016년 소방용수 도색·보온 사업 개선의견 수렴

- 시    기 : 2016. 1월 ~ 3월 당면 업무추진회의 시(2회)

- 대    상 : 대응총괄팀장(담당자)

- 문 제 점

√ 공사기간중 관리감독의 어려움 호소(지시사항 미온적 경향)

√ 업체위주 일정 공사추진으로 작업공정 지체 및 검수애로

- 건의사항 : 소방서별 개별 사업추진으로 효율성제고

○ 개선방향

- 계약방법 변경으로 예산집행 투명성과 공사감독(책임)강화

[기존] 제한경쟁입찰  ⇨  [개선] 연간 단가계약

계약의뢰 (재난대응과)	⇨	계약체결 및 통보 (공사업체 및 단가) (소방행정과)	⇨	공사의뢰 및 감독 (해당소방서) ※ 별도의 계약 불필요 소방서별 시기/수량결정	⇨	검수 및 정산 (해당 소방서)
		예산 재배정 (재난대응과)

Ⅲ				공사계획

○ 기    간 : 계약일로 부터 ~ 2016. 9. 30.

○ 수    량 : 6,241개소(도색 4,471개소, 보온 1,770개소)

○ 방   법 : 연간단가 계약(본부 소방행정과)

- 소방서별 자체계획 수립 추진(본부계약업체와 사전 협의)  ※ 입찰참가자격 : 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 전문건설업종 중 도장     공사업 면허를 등록한 업체로서 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅳ				추진일정

일 정	추 진 내 용
○ 2016. 3월(완료)	시장조사 및 사업계획 수립(재난대응과)
○ 2016. 4. 5(화)	공사원가 설계(재난대응과)
○ 2016. 4. 15(금)	계약변경 의뢰(소방행정과)
○ 2016. 5월중	입찰공고 및 계약체결, 예산재배정
○ 2016. 5월중	소방용수시설 도색 및 보온공사 착공
○ 2016. 9월~10월말	준공(9.30) 및 검수 완료

붙임 : 2016년 소방용수시설 도색 및 보온대상 1부.  끝.