투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신북초등학교 옥상녹화·텃밭조성공사 설계변경(정산) 시행

1. 시설과-1384호(2016. 4. 14)와 관련입니다.

2. 2015 공공건물 옥상녹화·텃밭조성사업의 일환으로 우리사업소에서 시행중인 신북초등학교 옥상녹화·텃밭조성 공사에 대하여 다음과 같이 보험료 정산 및 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 신북초등학교 옥상녹화·텃밭조성 공사

나. 위    치 : 신북초등학교 (마포구 월드컵북로38길 26)

다. 공사개요 : 수목식재, 휴식시설 설치 등 옥상녹화

라. 공사기간 : 2015. 12. 21  ~ 2016. 4. 18

마. 공사금액

- 당  초 : 129,263,000원

- 변경후 : 128,700,000원(감563,000원)

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감 액	비 고
도 급 액	129,263,000	128,700,000	감 563,000
공급가액	117,511,819	117,000,000	감 511,819
부 가 세	11,751,181	11,700,000	감 51,181

바. 변경내역

- 당  초 : 산수유 등 15종 750주 및 수호초 등 14종 5,564본 식재, 데크, 파고라, 텃밭상자 등 12종

- 변경후 : 산수유 등 15종 750주 및 수호초 등 14종 5,564본 식재, 데크, 파고라, 텃밭상자 등 12종, 보험료 정산 등

사. 도 급 자 : 산천종합조경  대표 이 재 원

아. 변경사유 : 보험료 정산 및 현장여건에 따른 시공내역 조정

붙 임    1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 도서(별도)1부.

3. 제비율검증 1부.  끝.

주무관	배소윤		★조경시설팀장	代정순주		시설과장	임병국		서부공원녹지사업소장	04/15 오진완
협조자	공원운영과장	이기성
시행	시설과-1407	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5545	/전송	300-5527	/	syhouse@seoul.go.kr	/	부분공개(5)