문서번호	토목부-7430
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	04/15 김영수
협조

교통안전시설 개선설치등 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설 개선설치등 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

보광삼거리에 대한 서울지방경찰청 교통안전시설 심의결과에 따른 교통안전시설 개선 및 교통안전시설물 설치에 대한 검토보고임

1		관련근거

❍ 교통관리과-1761호(2016. 1.22.) 교통안전시설 개선통보

❍ 기전과-3853호(2016. 4.12.) 교통안전시설물 원인자부담공사 사전승인 검토결과 통보

❍ 한종(서빙고)제16-038호(2016. 4.14.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2016. 4.30.

(5차 2015. 3. 2. ~ 2016. 4.30.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,882백만원(5차 8,270백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1

❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 검토목적

- 보광동삼거리 구간 교통안전시설 개선(유턴전용 신호등 신설, 차로 재구획, 기존 신호등 교체등) 및 교통안전시설물 추가설치에 대한 적정성 검토

❍ 교통안전시설 심의 및 원인자부담공사 승인 검토결과

구 분		교통안전시설 심의 및 원인자부담공사 승인 검토결과	비 고
서울지방경찰청 교통관리과-1761호 (‘16.1.22)		- 유턴전용 신호등 신설 - 차로 재구획 및 노면표시 개선
P1 P2 P3
서부도로사업소 기전과-3853호 (‘16.4.12)	- 노후제어기 교체 - 노후신호등 교체(지주포함, 디자인지주)
신호등 주 교통제어기

❍ 검토내용

1) 교통안전시설 개선 설계서 검토

구 분	주 요 검 토 내 용	비 고
유턴 전용 신호등 신설등	- 신호등 신설 1대, 차선도색 140m - 차선도색 140m, 교통표지판 3개 - 시선유도봉 설치 28개, 철거 31개	수량 및 단가 적정
노후신호등 교체등	- 신호등 교체 1대 제어기 교체 1대	수량 및 단가 적정

2) 설계비 및 감리비 반영

① 반영사유

- 서울지방경찰청 교통규제심의 및 관할도로사업소 협의결과 반영에          따른 추가 공사비 발생

② 관련규정 및 산출근거

- 관련규정

· 교통신호기 및 제어시스템 :전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부 고시 제2014-106호)

· 감리원대가:한국건설기술관리협회 공표(기술 331-7767호)

- 산출기준 : [(공사비×요율) × 낙찰율(81.57%)] 적용

단, 감리비는 실제 근무일수(5일) 기준으로 산정

3) 교통안전시설물 설치

① 구조물(교각) 빗금 표지

- 관련규정 : 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토해양부, 2012.)
5.2.2 구조물 도색 및 빗금표지

- 설치목적 : 도로를 주행하고 있는 운전자에게 차량의 진행 방향을 지시하여   구조물과의 충돌 방지기능

- 설치위치 : 신설교각(P1~P5) 양면 10개소

② 안내표지판(방향표지) 설치

- 설치목적 : 기존 고가교에 설치되어 있던 한남대교 및 반포대교 안내   표지판 신설교량에 재설치

- 설치위치 : 보광삼거리(신설교량 측면부)

- 설치규격 : 2,500×1,800mm(2개)

❍ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 기존공종 : 기존단가 적용

· 신규공종 : 낙찰율(81.57%) 적용

- 공사비 증·감 현황

공 종	단 위	수 량	금 액			비고
			당초(천원)	변경(천원)	증·감(천원)
부대공	식	1	-	8,248	8,248
직접공사비			-	8,248	8,248
제경비			-	2,862	2,862
설계 및 감리비			-	3,909	3,909
제어기 및 지주설치			-	24,081	24,081
공급가액			-	39,100	39,100
부가가치세			-	3,910	3,910
도급금액			-	43,010	43,010

4		조치계획

❍ 서울지방경찰청 교통안전시설 심의 및 서부도로사업소 원인자부담공사 사전승인 검토결과를 반영한 교통안전시설 개선과

❍ 차량운전자의 진행방향과 시인성 확보를 위한 교통안전시설물 설치에 대한 감리단의 검토내용이 적정함으로 승인하고자 하며, 향후 설계변경시 반영하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.