문서번호	설비부-5940
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 04/15 권오식
협조

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 보고

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성』과 관련 책임건설사업관리기술자로부터 전기공사의 관급자재 납품기한 연기요청이 있어 검토 보고 드림.

근    거

○ PC도전16-63(2016.4.11.)호 관급자재 납품기한 연기검토보고

보고내용

○ 납품기한 연기사유 : 납품시기 미도래

○ 관급자재 계약 현황(도심권 50+ 전기공사)

품 명	계 약 자	납품기한		납품금액	계약번호
		당 초	변 경
UPS	국제통신공업	‘16.7.23	‘16.10.27	15,583,000	00157020301
태양광	에스피브이	‘16.5.30		125,367,140	00158052500
자동제어	삼원씨앤지	‘16.8.31		46,310,000	12152257600
		‘16.9.30		68,690,000	12162009100
조명기구	금경라이팅	‘16.8.31		83,712,000	00157035801
		‘16.5.30		127,484,280	00157035802
	서광조명	‘16.5.19		2,450,000	00157019104
	파인테크닉스	‘16.5.30		15,778,000	22143136617
	우성엘이디	‘16.5.30		2,845,000	00148045110
		‘16.5.30		15,444,000	00147048303
		‘16.9.30		42,380,000
	루멘전광	‘16.5.30		4,646,400	22143142804

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 납품금액 : 변경없음

○ 감리단 의견

- 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 공사 중 전기공사 관급자재의              납품시기 미도래에 따른 납품기한 연기조치 필요

조치의견

○ 책임건설사업기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되며 원활한 사업추진을 위하여 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 전기공사 관급자재 납품기한을 연기코자 함.

행정사항

○ 건설총괄부에 납품기한 연기 의뢰

붙임 : 관급자재 납품기한 연기 요청 공문 1부. 끝.