투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 요청(경희궁 숭정전 정밀안전진단용역)

시설과-1821호(2016.4.15.)와 관련「경희궁 숭정전 정밀안전진단 용역」을 아래와 같이 변경계약 체결 요청합니다.

1. 용 역 명: 경희궁 숭정전 정밀안전진단 용역

2. 계약금액: 금47,000,000원(금사천칠백만원)

3. 계약기간: 2015. 12. 16. ~ 2016. 4. 15.

4. 용역내용: 경희궁 숭정전 정밀안전진단 1식

5. 도 급 자: 주식회사 정우구조엔지니어링

6. 변경내용: 준공기한 연기 (※ 계약금액 변경 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2016. 4. 15.	2016. 4. 25.	증 10일

7. 예산과목: 역사문화유산의 계승발전, 문화재보존복원, 국가지정문화재 보수, 시설비(401-01)

붙임: 1. 방침서 1부.

2. 과업지시서(변경) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이재미		시설과장	04/15 오삼록
협조자	총무과장	代김기용
시행	시설과-1822	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0122	/전송	02-724-0244	/	int1234@seoul.go.kr	/	대시민공개