문서번호	토목부-7429
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	04/15 김영수
협조

철도안전관리자 배치 정산보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

철도안전관리자 배치 정산보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

철도보호지구내 공사가 완료됨에 따라 실제 배치된 철도안전관리자 인원에 대한 정산 보고임

1		관련근거

❍ 토목부-21999호(2014.11.10.) 철도안전관리자 배치계획

❍ 한종(서빙고)제16-040호(2016. 4.14.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2016. 4.30.

(5차 2015. 3. 2. ~ 2016. 4.30.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,882백만원(5차 8,270백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1

❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 정산사유

- 철도안전관리자 배치계획에 의거 철도보호지구내(철도경계선으로부터 30m이내) 작업시 배치된 철도안전관리자(철도운행 안전관리자, 철도전기안전관리자, 열차감시원)의 실제 배치일로 정산이 필요함

❍ 검토내용

1) 배치계획

구 분	작업구분	단위	공종별/기간			계	비고
			기존고가교철거+신설교량	신설교량 +보수보강	가설교량 철거
			‘13.4~’14.9	‘14.10~’15.9	‘15.10~’15.12
철도운행 안전관리자	주간	인	353	323	79	755
	야간		66	154	25	245
철도전기 안전관리자	주간	인	-	-	-	-
	야간		50	154	25	229
열차감시원	주간	인	337	323	79	739
	야간		66	154	25	245

2) 실제 배치현황

구 분	작업 구분	단위	기존 고가교 철거	신설교량 + 보수보강	가설교량 철거	가설교량철거+구조물복구	투입 일수	비고
			‘13.4~’14.9	‘14.10~’15.9	‘15.10~’15.12	‘16.1~’16.4
철도운행 안전관리자	주간	인	353	319	83	83	838
	야간		66	55	73	9	203
철도전기 안전관리자	주간	인	-	-	-	0
	야간		50	49	73	9	181
열차감시원	주간	인	337	317	85	83	822
	야간		66	55	73	9	203

※ 공기연장(‘15.12→16.4)으로 인한 당초 배치계획 대비 공종 및 투입인력이 변경됨

3) 배치인력 증·감 현황

구 분	작업 구분	단위	배 치 계 획	실 제 투입인력	증․감	비고
철도운행 안전관리자	주간	인	755	838	83
	야간		245	203	-42
철도전기 안전관리자	주간	인	-	-	-
	야간		229	181	-48
열차감시원	주간	인	739	822	83
	야간		245	203	-42

4) 공사비 증·감 현황

공 종	규격	단위	수 량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
부대공
1.1 철도운행 안전관리자	주간	인	755	838	83	114,561	127,156	12,595
1.2 철도운행 안전관리자	야간	인	245	203	-42	55,763	46,204	-9,559
1.3 철도전기 안전관리자	야간	인	229	181	-48	23,351	18,457	-4,894
1.4 열차감시원	주간	인	739	822	83	52,254	58,123	5,869
1.5 열차감시원	야간	인	245	203	-42	25,986	21,531	-4,455
직접공사비						271,915	271,471	-444
제경비						54,130	53,984	-146
공급가액						326,045	325,455	-590
부가가치세						32,605	32,545	-60
도급금액						358,650	358,000	-650

4		조치계획

❍ 철도안전법 제45조(철도보호지구내에서의 행위제한)의거 철도보호지구내 철도안전관리자 배치에 대한 감리단의 정산 검토내용이 적정함으로 승인하고자 하며, 향후 설계변경시 정산하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.