문서번호	토목부-7851
결재일자	2016.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	04/20 김영수

선사로 ~ 고덕지구간 지중화사업 관련 유관기관(한전, 통신 등) 합동회의(3차) 보고

2016. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

선사로 ~ 고덕지구간 지중화사업 관련

유관기관(한전, 통신 등) 합동회의(3차) 보고

□ 회의개요

○ 공 사 명 : 선사로 ~ 고덕지구간 지중화사업(한전, 통신 등)

○ 일    시 : 2016. 4.19.(화) 16:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 감리단(4층 상황실)

○ 참 석 자 : 공사관리관, 감리단장, 시공사, 유관기관 등 13명

○ 안    건 : 지중화사업 추진 관련

□ 추진경위

○ ‘10.12.15.	: 아리수로 한전지중화 방침

○ ‘11. 2.28.	: 한전지중화사업비 납부

○ ‘11. 8.11.	: 지중화사업 협조 요청공문 발송(본부 → 통신사업자)

○ ‘11.10. 6.	: 통신선로 지중화 회의 결과 알림(본부 → 통신사업자)

○ ‘12. 3. 6.	: 통신선로 지중화에 따른 협조 요청(본부 → 통신사업자)

○   ‘15.11.24.	: 유관기관(통신 등) 지중화사업 합동회의(1차)

○   ‘16. 1.14.	: 유관기관(통신 등) 지중화사업 합동회의(2차)

□ 주요내용

○ 본 부

- 고덕산 종단인하 구간 기존 도로 흙깍기를 위해 한전주 조속히 철거필요

▸ 고덕시영재건축아파트 주·출입구인 샘터길 도로인하를 위해 한전주 철거가 필요하나, 통신선로 지중화가 안되어 철거가 어려운 실정이므로 기존 한전주 이설 필요

- 강일삼거리 및 횡단굴착(13개소) 조속히 추진

○ 유관기관(한전, 통신 등)

- 고덕시영재건축아파트 부지 경계부에 CP주(5개) 이전 설치(서울시 부담)

※ 동 구간 한전 지중화 완료(통신 미완료)

- 강일삼거리 및 횡단굴착구간(13개소)은 도로굴착 복구비 납부시 ‘16. 5.15까지 완료 예정임.

□ 검토 및 조치계획

○ 고덕산 도로종단 인하구간내 한전주에 매달려 있는 통신선로 제거는 지중화사업이 완료되는 ‘16.9월말경 철거가 가능한 실정임.

○ 고덕시영재건축아파트 주·출입구 도로종단 인하(흙깍기 작업)를 위하여  우선 한전주(5개) 이설이 불가피한 실정임.

○ 한전주(통신사에서 작업) 이전에 따른 비용부담은 서울시 부담(한전주 이설 요청)

- 소요비용 : 약 20,000천원

□ 향후 추진 계획

○ ‘16. 4.19. : 도로굴착복구비 납부

○ ‘16. 4.21. : 굴착 착공계 제출

○ ‘16. 4.25. : 굴착 시행

○ ‘16. 5.15. : 굴착 완료

○ ‘16. 7.15. : 지중 선로작업 완료

○ ‘16. 9.30. : 지중화 사업 완료(한전주 제거)

붙 임 : 회의록 1부.  끝.