문서번호	시설관리과-9622
결재일자	2016.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김재엽	김근용	代김근용	04/20 이인걸
협 조
	주무관		문병희

·

설계변경 계획(3회-최종)

(2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

2016. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

설계변경 계획(3회-최종)

우리사업소에서 시행중인 「2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」와 관련하여 신규공종 및 물량증감에 따른 설계변경(3회-최종)을 시행 코자 함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

나. 공사개요 : 밸브교체 130개소, 변실정비 243개소, 배수지 유지관리 35개소

다. 계 약 일 : 2015. 04. 07.

라. 공사기간 : 2015. 04. 07. ~ 2016. 04. 30.

마. 계약금액 : 금683,022,340원(총부기금액)

바. 도 급 자 : 카본코리아(주) 대표 구본영

2. 보고내용

가. 설계변경사유

- 신규공종 발생 및 물량 증․감에 따른 설계변경 시행

․ 신규공종 : 손잡이 교체외 5종

․ 물량증가 : 아스팔트 포장깨기(굴삭기 0.2㎥, 브레이카)외 32종

․ 물량감소 : 아스팔트 포장절단(100~150㎜)외 252종

나. 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
콘크리트 포장절단	100~150㎜	m	4145	2622	감) 1523
플랜지 접합공	100㎜	개소	135	7	감) 128
제수밸브 부설 및 접합공	100㎜	개소	149	34	감) 115
이탈방지압륜접합공	80㎜	개소	198	177	감) 21
주철(이형관)부설공	200㎜	개소	32	39	증) 7
KP조인트관 접합공	80㎜	개소	49	68	증) 19

3. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	833,022,340	814,600,000	감) 18,422,340
도 급 비	683,022,340	564,600,000	감) 118,422,340
관급자재비	150,000,000	250,000,000	증) 100,000,000

- 2015년 정산에 따른 차수별 금액 현황

구분	총부기금액(원)		1차분		2차분
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
도급비	683,022,340	564,600,000	401,050,000	401,050,000	281,972,340	163,550,000

4. 처리계획

- 사업소 자체 심의 후 신규단가 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 문병희 ☎3146-3994 담당 :김재엽☎3146-4005