서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	차수 계약 의뢰(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

1. 재무과-16526호(2016.4.6.)와 관련입니다.

2. “차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역”에 대하여 아래와 같이 차수계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용역명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

- 용역기간

․ (1차) 2016.4.20.~2016.12.31

․ (총차) 2016.4.20.~2017.10.11

- 용역사 : ㈜이산 대표 이원찬 외 2

- 용역비

․ (1차) 일금800,000천원

․ (총차) 일금1,464,700천원

나. 차수계약 의뢰내용

구분	과업기간	용역비	사 유
당초	2016.4.20.~2016.12.31	1,464,700천원	연도별 예산집행계획 반영
변경	2016.4.20.~2016.12.31	(1차)800,000천원
	2016.4.20.~2017.10.11	(총차)1,464,700천원

붙임 : 계약서(총차), 계약서(1차).(추후 제출) 끝.

	물재생시설과장
주무관	박만헌		주무관	강청금		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	04/21 이철해
협조자
시행	물재생시설과-5809	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개