문서번호	시설관리과-7969
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정희종	김충완	장종욱		04/21 代정의석
협 조
	급수운영과장		이계환

월계배수지 유량계 신설계획

2016.4.

북부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

월계배수지 유량계 신설계획

월계배수지의 유입부는 BB-1유량계로 측정이 가능하나, 월계배수지

유출부의 공급물량 파악이 안되고, 중블록 유수율 관리에 어려움이 있어

효율적인 배수지 및 유량관리를 위하여 유출부에 초음파 유량계를 설치

하고자 함.

1		시설현황

시설명 : 월계배수지

시 설 명	위 치	배수지용량	급수구역 (급수인구)	관경
월계배수지	**************	100,000㎥	강북구,노원구,도봉구 (86,000여명)	유입부 1650mm
				유출부 2200mm

2		사업개요

사업기간 : 2016년 4월 ~ 6월

사업내역

❍ 월계배수지 유출부 유량계, 유량계 전송반, 유량계실 신설

유량계 설치 위치 : 월계배수지 유출부

❍ 현장사진

３		추진계획

유량계 변실 신설 : 급수운영과 시설물 담당

유량계 변실을 신설토록 급수운영과 시설물 담당에게 협조의뢰

유량계 구매 및 유량계 전송반 구매설치

❍ 유량계 구매

구매대상 : 초음파유량계(2200mm)

계약방법 : ********

소요예산 : *******

❍ 유량계 전송반 구매설치

내    역 : 유량계전송반 구매설치 및 프로그램수정 1식

계약방법 : ******

소요예산 : *******

예산과목 : 상수도 사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

4		추진일정

❍ 2016. 4.  : 유량계실 설치(시설물담당)

❍ 2016. 5.  : 유량계 및 유량계전송반 구매 발주

❍ 2016. 6.  : 납품 및 준공완료  끝.