투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사 김 수 호 귀하 (06246 서울특별시 강남구 논현로 419 (역삼동,피엠케이빌딩 9층))
(경유)
제목	부진공정만회대책 수립 및 공정관리등 건설사업관리용역 수행 철저

1. PC재사용16-159(2016. 4.18)호, 건축부-3310(2016. 3.17)호 및 건축부-2422(2016. 2.26)호, 건축부-2085(2016. 2.19)호, 건축부-14369(2015.12.15.)호와 관련입니다.

2. 우리시와 건설사업관리용역계약 체결하여 재사용플라자 건립공사에 대하여 건설사업관리용역 수행과 관련하여 2016. 4.20자 시공사, 펨코엔지니어링건축사사무소, 발주처간 부진공정만회 대책회의와 관련하여 아래와 같이 사안에 대하여 조치하여 주시기 바랍니다.

1) 2016. 4. 20 현재 재사용플라자 건립공사 공정율

○ 계획 36.42% 대비 실시 31.13%로 85.47%로 14.53% 공기지연되고 있으므로 2차공사계약이행 될 수 있도록 가능한 방안 및 대책 수립하시기 바람

2) 2차수공사 계약 이행에 차질이 없도록 인력, 장비, 자재, 자금을 적기 투입토록 추진(2차수공사계약 이행을 위한 시공사 인력보강등 필요한 조치 포함) 및 공정관리, 안전관리, 품질관리 철저

3) ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사, 동원건설산업(주) 및 ㈜서우건영 임원, 책임건설사업관리기술사, 현장대리인이 참석하는 주1회 부진공정 만회대책회의 개최하여 부진공정 분석 및 공기만회대책 수립·시행

4) 시공사에서 2016. 3월 부진공정만회대책 미제출과 관련하여 시공사의 귀책사유(2차수공사 공기지연)로 인하여 현재까지 실시하고 있는 야간작업, 휴일작업등 인력등 추가 자금투입으로 향후 시공사의 간접비 소송이 예상되므로 간접비등 행정소송이 제기되지 않도록 필요한 행정적인 조치를 강구하시기 바람.

5) 현재 지하1층 골조공사중으로 고소작업을 실시하고 있으므로 작업인부 추락방지를 위한 낙하방지 안전시설, 안전줄등 안전시설물 설치 및 작업인부 안전모, 그네걸이안전대 착용과 병행하여 작업투입전 안전교육 실시후 공사현장에 투입토록 조치하시기 바라며, 골조공사중 고소작업인부 및 자재낙하로 인하여 안전사고 발생이 우려되므로 골조공사완료시까지 건설안전기술사의 전담배치를 적극 검토하여 조속한 시일내 수립·시행하시어 작업인부등에 대한 안전관리에 만전을 기하시기 바람.

6) 안전관리과-1985(2016. 3.16)호에 의한 위험공종 사전작업 허가제 실행계획 방침에 따라 높이 4.2m이상의 시스템동바리 조립 및 해체공사, 대규모 콘크리트 타설(건축:콘크리트타설량 150㎥이상)공종등은 10일전 안전관리과로 구조계산서등 필요한 서류를 첨부하여 요청하시기 바람.

3. 추가로, 공사진행에 지장이 없도록 연결데크 설계용역도 2016. 4월중으로 완료될 수 있도록 추진하시고 향후 공정관리 및 안전관리, 품질관리에 철저를 기하여 건설사업관리용역 수행 부실에 따른 불이익 행정처분을 받지 않도록 용역 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	신명승		건축부장	04/21 안재혁
협조자
시행	건축부-5240	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)