투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	부진공정 만회대책 제출 촉구 및 공사계약사항 이행 요청

1. PC재사용16-159(2016. 4.18)호 및 서울시 도기본 건축부-2422

(2016. 2.26.)호, 건축부-2085(2016. 2.19)호, 건축부-14369(2015.12.15.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 우리시와 공사계약 체결하여 시공중에 계신 재사용플라자 건립공사의 공정율이 2016. 4.20 현재 계획 36.42% 대비 실시 31.13%로 85.47%로 14.53% 공기지연되어 있음을 알려드리니, 귀 사에서는 부진공정 만회대책(인력·장비·자재의 주간·월별 상세투입계획, 우기를 반영한 공정관리, 안전관리, 시공사인력보강등 포함)수립하여 건설사업관리단에 2016년 5월 3일(화)까지 제출하시어 2차수공사계약사항이 이행될 수 있도록 공정관리등에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 현재 지하1층 골조공사 중으로 고소작업을 실시하고 있어 안전사고 발생이 우려되므로 고소작업인부 추락방지를 위한 낙하방지 안전시설, 안전줄 등 안전시설물 설치하여 주시고 작업인부는 안전모와 그네걸이안전대 착용과 병행하여 작업투입전 안전교육 실시후 공사현장에 투입될 수 있도록 조치하시어 고소작업인부 추락 및 자재낙하, 건설장비 등으로 인하여 안전사고 발생이 되지 않도록 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	동원건설산업(주) 대표이사 김 영 현 귀하(06775 서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동, 동일산업빌딩 6층)),(주)서우건영 대표이사 김 기 수 귀하(05559 서울특별시 송파구 백제고분로17길 54 (잠실동, 선영빌딩 2층))
주무관	김찬유		환경시설과장	신명승		건축부장	04/22 代박범규
협조자
시행	건축부-5295	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)