문서번호	정보자원운영과-1475
결재일자	2016.4.22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

						시 민
주무관		정보자원운영과장		데이터센터소장
임연주		김영숙		04/22 이계헌
협 조
	기획관리과장				김안철
	인터넷통신과장				황기원

2016년

정보시스템 유지관리 사업 계약변경 계획(3차)

2016. 4.

데이터센터

(정보자원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 정보시스템 유지관리 사업 계약변경 계획(3차)

2016년 정보시스템 유지관리 용역 사업대상 중 일부시스템이 서비스가 중단됨에 따라 대상 물량을 계약에서 제외하고 계약금액을 변경(감액)하고자 함

I		관련근거

❍「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조 및 동법 시행령 제74조 제1항

❍ 정보시스템 유지관리 용역 과업지시서 PMR-006

❍ 정보통신보안담당관-3066(‘16.2.12), 정보시스템담당관-3772(‘16.3.31)

Ⅱ		사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 정보시스템 유지관리 용역

❍ 사업기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31(12개월)

❍ 계 약 자 : 다우기술 컨소시엄

[㈜다우기술 50%, ㈜코마스 40%, ㈜그루기술 10%]

❍ 계약금액 : 금 ₩4,976,514,550원

※ 계약변경 내역

- 1차 계약변경

◦ 계약일자 : ‘16. 2. 4

◦ 제외장비 : HW 11식, SW 4식

◦ 금액변경 : 76,863,190원 감액 (5,064,378,000원 → 4,987,514,810원)

- 2차 계약변경

◦ 계약일자 : ‘16. 3. 3

◦ 제외장비 : HW 5식

◦ 금액변경 : 11,000,260원 감액 (4,987,514,810원 → 4,976,514,550원)

Ⅲ		계약변경

□ 변경사유(3차)

❍ ‘2015년 정보자원 통합 인프라 구축’ 사업으로 인해 일부 서버가 교체됨에 따라 서비스 중단된 H/W 유지보수 제외

- 총 12식 (HW 10식, SW 2본)

: 백오피스(HW 9식, SW 2본), 프론트오피스(HW 1식)

구분	부서명	업무서비스	유지관리 대상	수량	제외기간
백오피스	정보시스템담당관	시도행정 시스템	IBM p570	3식	‘16. 4.1 ~ 12.31
			HP DL580	2식
			IBM x3800	1식
			히다찌 NSC55	1식
			IBM x3250	2식
			HDLM	1본
			FCIP	1본
프론트오피스	정보통신보안담당관	웹하드	Galaxy	1식

□ 금액변경 및 내용

항 목	기 존	변 경	비 고
사업기간	‘16.1.1～’16.12.31	변경없음
계약금액	4,976,514,550원	4,943,591,530원	32,923,020원 감액
계약내용	◦ 정보시스템 유지관리 1,198식(H/W 656, S/W 542) - 백오피스 704식 (HW 359, SW 345) - 프론트오피스 415식 (HW 257, SW 158) - 백업센터 3식 (HW 3) - 종합관제실 76식 (HW 37, SW 39)	◦ 정보시스템 유지관리 1,186식(H/W 646, S/W 540) - 백오피스 693식 (HW 350, SW 343) - 프론트오피스 414식 (HW 256, SW 158) - 백업센터 3식 (HW 3) - 종합관제실 76식 (HW 37, SW 39)

▹ 감액금 산출 = 1개월 유지보수료(제외대상) × 제외개월수 × 낙찰율(96.0%)

Ⅳ		행정사항

❍ 용역 계약변경 합의서 작성 : 용역사업자(다우기술 컨소시움)

❍ 계약 변경의뢰 및 계약변경 : 정보자원운영과, 기획관리과

붙임  1. 2016년 정보시스템 유지관리 용역 계약물량 변동내역(3차) 1부.

2. 유지관리 대상 제외 공문	1부.

3. 합의서 및 각서	1부.