급수공사 공사기간 연기 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	고태우	김홍준	04/22 박길영

	명에 의하여 『2015년 홍제1동외 13개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2016. 4. 22.
보 고 자 : 직 지방시설서기보 성명 : 고태우

복 명 내 용
건 명	공사기간 연기 보고서(서대문구 북가좌동 337-37)
내용	1. 공사위치 : 서울시 서대문구 ************ 2. 작업지시번호 : 신설-100 3. 급수공사 종별 : 공동신규 4. 보고 내용 - 상기 위치에 급수공사 작업지시 하였으나, 현장의 자재적치 및 동발이 철거후 공사 가능 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 공사기간을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전 을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2016. 04. 13. ～ 2016. 04. 22. 변경 공사기간 : 2016. 04. 22. ～ 2016. 04. 29. 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.