문서번호	조경과-5680
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
박혜선	하재호	04/22 이원영

노후 마을마당 보수정비사업 대상지 변경(추가)요청 검토 보고

2016. 4.

「노후 마을마당 보수정비사업」

대상지 변경(추가)요청 검토 보고

중랑구 공원녹지과-6137(2016.4.20.)호로 요청한「2016년 노후 마을마당 보수정비사업」 대상지 변경에 대한 타당성 등 검토 결과임.

□ 추진경위

○ ’16. 1. 13.: ’16년도 사업 추진계획 수립

○ ’16. 1. 13.: 추진계획 시달(조경과 ￫ 성동구 등 12개 자치구)

○ ’16. 4. 20.: 대상지 변경 승인 요청(중랑구 ￫ 조경과)

□ 변경 요청사항

○ 요청기관: 중랑구

○ 변경내용: 대상지 추가 선정 요청

- 당    초: 1개소 (피울공원)

- 변    경: 2개소 (용마산역마을마당 추가 선정)

○ 변경사유

- 피울공원의 노후 시설물(경계펜스)은 부분 교체를 통해 사업비 절약

- 주민 이용이 많은 용마산역마을마당 포장 교체 및 수목 보식 추가

□ 변경 대상지 현황분석

○ 용마산역 마을마당

- 위    치: 중랑구 면목4동 1382-14 외 3

- 내    역: 2001년, 규모 : 983.9㎡, 소유 : 시유지

- 현    황: 용마산역 출입구 근처 유동인구 및 차량 통행량이 많은 곳에 위치하며, 바닥포장 및 수목의 훼손 등이 발생하였음.

위치도	현황 사진

□ 보고자 의견

○ 추가 대상지는 시유지에 위치하고, 이용객이 많아 빠른 정비가 필요한 것으로 판단되므로,

○ 사업 효과성 및 예산의 효율적 집행 등을 고려하여 대상지 변경(추가 선정) 요청을 승인하고자 함.

붙임 사업대상지 변경 요청서(중랑구) 1부.  끝.