문서번호	총무과-14315
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이기림		임철수	04/22 이혜경
협조

청사(본관 및 서울도서관) 정밀점검 용역 시행계획

2016. 4.

행 정 국

(총 무 과)

청사(본관 및 서울도서관) 정밀점검 용역 시행계획

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제6조에 따라 시청사(본관, 서울도서관) 정밀점검을 시행함으로써 물리적·기능적 결함에 대하여 사전 조치를 실시하여 시설물 안전관리에 철저를 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시) ① 관리주체는 시설물의 기능과 안전을 유지하기 위하여 제13조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단지침에 따라 소관 시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

※최초로 실시하는 정밀점검은 시설물 준공일(’12.8.31) 기준 4년 이내 실시(시행령 제14조제1항)

○ 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침(국토부 고시 2015-467호)

□ 추진방향

○ 현장조사를 통해 시설물의 위험요인을 발견하고, 신속한 보수 시행

○ 안전 및 유지관리에 필요한 방안을 마련, 재해예방과 시설물의 효용 증진

□ 대상 시설물

구 분	본 관	서울도서관	비고
위 치	서울시 중구 세종대로 110
시설규모(㎡)	지하5층, 지상13층	지하4층, 지상5층	층수
	72,032㎡	18,710㎡	연면적
구조형식	철골철근콘크리트조	철근콘크리트조
준공일	2012.08.31	1926.09.05
관리주체	서울특별시 총무과

□ 정밀점검(용역) 개요

○ 과 업 명 : 청사(본관 및 서울도서관) 정밀점검

○ 기    간 : 착수일로부터 50일

○ 과업 주요 내용

- 구조계산서 및 준공도면 등 자료수집 및 분석 실시

- 면밀한 외관조사를 위한 현장조사 및 시험 시행

- 대상시설물 주요 부재별 상태평가 및 안전등급 지정 등

□ 계약방법 및 소요예산

○ 계약방법 : 제한공개경쟁 (전자공개 수의계약)

○ 입찰참가 자격

- 주된 영업소가 서울시에 소재하고 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조 및 같은 법 시행령 제11조에 의거 안전진단 전문기관(종합 또는 건축분야)으로 등록된 업체로서

- 같은 법 시행령 제7조에 따라 안전점검 또는 정밀안전 진단교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체

○ 소요예산 : 39,710천원 (VAT포함)

항목	산출내역	소요금액	비고
직접인건비	57인·일 × 209,485원	11,940,645원	정밀점검 대가기준 적용 (국토부 고시 제2015-467호)
제경비	인건비 × 110% (기준 110~120%)	13,134,709원
기술료	(인건비+제경비) × 30% (기준 20~40%)	5,015,071원
직접경비	(여비, 차량운행비, 인쇄비 등)	6,070,473원
소계		36,100,000원	만원이하 절사
부가세		3,610,000원	10%
합계		39,710,000원

○ 예산과목 : 행정국. 행정국 총무과. 행정지원체계 강화. 청사관리.	쾌적하고 안전한 청사관리. 시설비.

□ 추진 일정

○ 청사(본관 및 서울도서관) 정밀점검 용역 시행계획 수립	’16. 4. 22.
○ 기술용역 타당성 심사의뢰(기술심사담당관)	’16. 4. 25.
○ 입찰공고	’16. 5월 중
○ 계약체결, 용역착수 및 시행	’16. 5 ~ 6월
○ 준공 및 대가지급	’16. 7월

붙임 1. 서울특별시 청사(본관 및 도서관) 정밀점검 과업내용서 1부.

2. 서울특별시 청사(본관 및 도서관) 정밀점검 용역설계서 1부.  끝.