문서번호	의사담당관-2584
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	의정정보화팀장	의사담당관	시의회사무처장
김주형	김재봉	전명수	04/22 한문철

상임위원회 전자회의 운영장비 교체 사업 완료보고

2016. 4.

서울시의회사무처

(의사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상임위원회 전자회의 운영장비 교체 사업 완료보고

원활한 상임위원회 전자회의시스템 운영을 위한 「상임위원회 전자회의 운영장비 교체 사업」이 완료됨에 따라 그 결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 상임위원회 전자회의 운영장비 교체

○ 사업기간 : 2016. 3. 15 ~ 4. 15

○ 계약금액 : 227,700천원

○ 계 약 자 : ㈜그루기술

○ 주요 사업내용

- 10개 상임위원회 의원용 전자회의 단말기 및 운영용PC 교체

- 전자회의 운영 단말기 관리 S/W 설치

- 안정적인 의원용 네트워크 환경구축을 위한 인터넷 웹가속기 설치

○ 추진경과

- 사업계획 수립 및 입찰발주	: 2016. 2. 1  ~ 3. 14

- 계약체결 및 사업 준비	: 2016. 3. 15 ~ 3. 18

- 회의실 사전 조사 및 기존 장비 철거	: 2016. 3. 18 ~ 3. 29

- PC 및 노트북 장비 납품 및 설치	: 2016. 3. 30 ~ 4. 10

- 관리 S/W 설치 및 전자회의시스템 최적화 : 2016. 4. 1  ~ 4. 10

- 시험운영 및 사용자 교육	: 2016. 4. 11 ~ 4. 15

□ 납품내역 및 검수결과

번호	세부내역	제조사	수량	검수결과
1	전자회의 단말기, 단상 운영용 PC	에이텍	155대	이상무
2	전자회의 의원석 터치 모니터	은진디스플레이	127대	이상무
3	전자회의 운영용 단상 모니터(17”)	LG	10대	이상무
4	전자회의 운영용 단상 모니터(19”)	LG	28대	이상무
5	전자회의 운영용 노트북컴퓨터	삼성전자	28대	이상무
6	전자회의 단말기 네트워크 관리 (원격제어) S/W	그루기술	10식	이상무
7	전자회의 단말기 복구 S/W	IZEX	183식	이상무
8	신규 단말기 OS 변경에 따른 원활한 전자회의 시스템 운영을 위한 최적화	그루기술	1식	이상무
9	인터넷 웹 가속기	인스랩	1식	이상무

○ 사업 중 추가 요구 사항

- 의원석 PC의 원활한 USB 드라이브 사용을 위한 USB 연장 케이블 설치

- 회의장 전광판 화면 전환을 위한 노후한 영상(RGB) 스위치 교체

- 전문위원실 사용자 교육 중 요구사항을 반영하여 단말기 네트워크 관리(원격제어) 프로그램 일부 개선

○ 시험운영 결과 : PC 및 모니터 성능, 전광판 영상표출 연계 등 모두 정상작동하며 원활한 전자회의시스템 운영 가능

□ 설치과정

< PC 입고 >	< 터치모니터 입고 >		< 노트북 입고 >
< PC 본체 설치 >	< 터치모니터 설치 >		< 노트북 설치 >
< 도시안전건설위원회 회의실 전경 >		< 교육위원회 회의실 전경 >

□ 기타 운영사항

○ 준공 후 1년간 무상 유지보수 지원

○ 상임위원회 회의 개최 1일전 사전점검, 당일 시스템 점검 및 지원

붙  임  :	사업 수행 완료보고서 1부.  끝.