투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결-당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치 전기공사

1. 기반시설과-1064(2016.4.4.)호와 관련입니다.

2. 「당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치 전기공사」건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치 전기공사
계약상대자	백산전기건설공사 (대표 : 이강호)
계 약 금 액	금115,878,840원(금일억일천오백팔십칠만팔천팔백사십원)
계 약 일 자	2015.08.04.
공 사 기 간	2015.08.04. ~ 2016.04.29.

나. 변경내역 : 공사기간 변경

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2015.08.04. ~ 2016.04.29.	2015.08.04. ~ 2016.05.20.

다. 변경사유 : 토목공사 공기연장으로 인한 후속공정인 전기공사 준공기한 연장

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 변경계약보증서 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	04/25 이상국
협조자
시행	총무과-6559	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)