문서번호	도시철도토목부-5143
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
임경태		김정수	04/25 김진팔
협조
	주무관		장대성

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

입출고선 구간의 도시가스 관로 이설방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

입출고선 구간의 도시가스 관로 이설방안 검토 보고

본공사중 입출고선 구간의 도시가스 관로는 교각기초(5번)에 저촉되어 이설토록 설계되었으나 현장확인(줄파기) 결과 향후 신설 예정인 고덕교 교각에 저촉되어 당초 설계대로 시공이 불가함에 따라, 이에 따른 이설계획을 변경코자 실정보고한 사항에 대한 검토 보고임

※ 이설비 : 당초 36백만원 ⇒ 변경 51백원 (증 : 15백만원)

Ⅰ		관련근거

○ 공사계약일반조건 제6절(공사의 설계변경), 제7절(계약금액의 조정)

○ 대한(하남) 제16-211호(2016.4.19.) 지장물(도시가스 및 지역난방)이설에 따른  실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 :   471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 입출고선 구간의 상수도관 관로는 교각기초(5번)에 저촉되어 이설토록 설계되어 있으나,

○ 현장확인(줄파기) 결과 향후 신설 예정인 고덕교 교각에 저촉되어 당초 설계대로 시공이 불가함에 따라, 이에 따른 이설계획을 변경코자 실정보고한 사항에 대한 검토 보고

※ 당초 : D=300mm, L=36m  ⇒  변경 D=300mm, L= 24m

□ 지장물 현황

○ 당초

○ 변경

□ 지장물 현황 및 공사비 증 · 감 현황

구 분	당초 설계	금회 변경	증감
규 격	D=300mm	D=300mm	-
이설수량	L=36m	L=24m	(감)12m
이 설 비	36,000,000원	50,699,960원	(증)14,699,960원

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 도시가스관 이설계획 변경은 입출고선교량 교각기초(5번) 및 향후 신설 예정인 고덕교 보도교량 교대 기초에 저촉되지 않도록 적정하게 계획 되었음.

○ 청구된 이설비는 추후 이설비 적정성 검토 및 검증위원회 검증 절차을 통하여 조정코자 함

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 승인조치하고,

○ 지역난방 이설비는 추후 검증위원회 검증절차를 통하여 적정성을 검토한 후 이설비를 납부코자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부. 끝.