보    고    서

등록번호	시설관리과-12033

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	최준혁	채재일	04/25 代채재일

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016.  04.25.

***************************

공사현황

❍ 공 사 명 : 2015년 창신동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
개량-133	********** *********	*****************	***********	수요가 공사연기 요청으로 급수공사 완료시까지 연기 신청 합니다.
개량-152	****************	******************	***********	수요가 공사연기 요청으로 급수공사 완료시까지 연기 신청 합니다.
개량-157	*******	******************	***********	수요가 공사연기 요청으로 급수공사 완료시까지 연기 신청 합니다.
개량-160	********	******************	***********	수요가 공사연기 요청으로 급수공사 완료시까지 연기 신청 합니다.
신설-140	********	******************	***********	수요가 공사연기 요청으로 급수공사 완료시까지 연기 신청 합니다.
신설-146	********	******************	***********	수요가 공사연기 요청으로 급수공사 완료시까지 연기 신청 합니다.

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 수요가의 공사연기 요청 및 현장준비 미흡(현장

자재적치, 양수기함 미설치)으로 수요가와 공사일정 재협의 후 공사완료시까지 작업연기 하고자 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.