투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(잠원2빗물펌프장 신설공사 수문권양기)

1. 우리 본부에서 시행중인 『잠원2빗물펌프장 신설공사』에 소요되는 관급자재(수문권양기)의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 잠원2빗물펌프장 신설공사

나. 계약건명 : 잠원2빗물펌프장 신설공사-수문권양기

다. 납품기한 연기

(단위 : 원)

계약번호	품 명	계약업체	계약금액	납품기한		계약일자
				당 초	변 경
12131013301	수문권양기(총차)	광희 엔지니어링 (주)	303,853,000	`16.04.30	`16.06.30	`13.02.28
12131013301	수문권양기(1차)		137,090,500	`16.04.30	`16.06.30	`13.02.28
12161037600	수문권양기(2차)		166,762,500	`16.04.30	`16.06.30	`16.04.20

※ 계약금액 변동 없음

라. 연기사유 : 수문 설치시기 미도래

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  :  관련문서 및 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	추한영		열빛총괄과장	유병기		설비부장	04/25 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-6468	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8610	/전송	02-3708-8659	/	cc2436@seoul.go.kr	/	부분공개(5)