문서번호	급수운영과-7496
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
김종수	代김용현	04/25 代장성만
협 조
	주무관	김용현

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

「2015년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」 설계변경(5회, 최종) 및 계약금액 조정 시행

2016. 04.

강동수도사업소

(급수운영과)

「2015년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」

설계변경(5회,최종) 및 계약금액 조정 시행

「2015년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」의 시공 물량 증․감으로 설계변경 및 계약금액 조정(증액)이 요구됨에 따라 본부(재무회계과) 설계변경 심의를 요청, 효율적인 예산 집행이 될 수 있도록 시행에 만전을 기 하고자 함

□ 공사 현황

□ 공 사 명 : 2015년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)

□ 공사개요

- 당 초 : 아스팔트포장 180a, 콘크리트 1a, 보도블록 3a

- 변 경 : 아스팔트포장 212.97a, 콘크리트 0.04a, 보도블록 1.53a

□ 계약기간 : 2015. 04. 29. ~ 2016. 04. 30

□ 도 급 자 : 한림토건   대표 이현숙

□ 도 급 비

- 당초 : 2,186,753,700원

- 변경 : 2,400,244,000원

․증액 :   213,490,300원,  증)9.76%

□ 보고 내용

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 및 계약금액 변동(증)

- 시공물량 (증.감)현황

구분	포 장 공(a)		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
아스팔트 포장	180.0	212.97	증)32.97
콘크리트 포장	1.0	0.04	감) 0.96
보도블록 포장	3.0	1.53	감) 1.47

- 계약금액 변경(조정) 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비고(비율)
도 급 비	2,186,753,700	2,400,244,000	증)213,490,300	증)9.76%

- 공종별 변경내역

구 분	당 초	변 경	증․감
토 공	283,034,778	332,479,396	증) 49,444,618
포장공	881,200,434	996,239,953	증)115,039,519
부대공	81,576,807	97,592,840	증) 16,016,033
사급자재	174,620,966	205,244,474	증) 30,623,508

※ 보험료(건강,노인장기요양,연금) 및 퇴직공제부금 실정산

□  계약금액 증액 사유

- 2015~2016년 주택건설 수요 증가에 따른 급수공사 물량 증가로 부대공사인 포장복구공사 물량 증가로 상기와 같이 계약금액 증가됨

․’15년 천호1동외 17개동 상수도공사 등 3개 공사의 계약금액 조기 소진으로 추가발주(1건) 및 계약기간 만료(당초 ’16. 6. 30) 전 조기 발주(2건) 시행

① ’15년 천호1동외 17개동 상수도공사 : ’15. 12. 18.<2차공사 추가 발주(완료)>

② ’15년 석촌동외 11개동 상수도공사 : ’16. 4. 19.<조기 발주(완료)>

③ ’15년 마천동외 13개동 상수도공사 : ’16. 5월초. <발주 심사의뢰(예정)>

□ 조치 의견

□ 위 와 같이 시공 물량 증․감 사항이 발생되어 물량증가 공종에 대하여 계약 단가로 적용

□ 설계변경 사항에 대하여 적법성여부 등을 검토 및 심의하여 설계변경에 반영하고자 상수도사업본부(재무회계과)에 계약금액 조정 검토 의뢰 및 결과 통보 후에 본청 재무과에 설계변경 계약의뢰하고자 함

첨부 : 설계변경내역서 1부. 끝.