문서번호	정수시설과-1193
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		김긍채	04/25 박기석
협조

침전지 슬러지 배출설비 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2016.  4.

강북아리수정수센터

정수시설과

침전지 슬러지 배출설비 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『침전지 슬러지 배출설비 보수공사』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 심의대상

○ 공사명 : 침전지 슬러지 배출설비 보수공사

○ 공사개요

- 슬러지배출밸브 교체 : BFV Ø400, 12대, 신축관 Ø400, 12대

- 슬러지배관류(STS)교체 : 11대

- 전원, 제어설비  : 1식

○ 공사기간 : 2016. 02. 23 ~ 05. 02

○ 계약금액 : 89,123,120원

○ 도 급 자 : ㈜진성기업 대표 오태석

2. 심의일시 : 2016. 4. 21.(목)

가. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경개요

구 분	금 액		증, 감
	당 초	변 경
도 급 비	89,123,120	85,770,000	-3,353,120

나. 주요 공종 변경사항

- Ø200㎜ 용접개소가 132에서 110으로 22개소 감소

- 건강, 연금 및 노인장기요양보험료 미지급에 따른 정산

▸ 주요 물량 증, 감

공 종	규격	단위	수 량		증, 감액(천원)
			당 초	변 경	증	감
용접개소	Ø200	개소	132	110(감22)	-	약1.500
건강,연금,노인장기보험료	1식	원	1,318,591	0	-	약1,800
계						약3,300

4. 심의내용 및 결과

공 사 명	심 의 내 용	결 정 내 용
침전지 슬러지 배출설비 보수공사	◦ 설계변경 타당성 ◦ 신규공종 단가산출 타당성 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정성 ◦ 각종 제반규정 준수여부	◦ 설계변경 타당 ◦ 신규공종 없음 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦ 각종 제반규정 준수타당

※ 본청 원가관리시스템에 의하여 제비율 검증 실시(2016. 4. 21)

5. 조치의견

공사 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 정산 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 심의결과서       1부.

2. 심의 결정된 변경 설계서  1부.

3. 제비율 검증              1부.   끝.