문서번호	급수운영과-8518
결재일자	2016.4.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
구자광		최용진	04/26 이계환
협 조
	주무관			장병철

'16년 소형저수조(주택)직결전환 및 철거 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

북부수도사업소

급수운영과

『주택의 소형저수조(신발생)』

‘16년 소형저수조(주택) 직결전환 및 철거 추진계획

‘16년 신발생된 주택의 소형저수조에 대해 직결급수 전환 및 철거하여    수돗물 음용환경 개선 및 맑고 깨끗한 아리수를 공급하고자 함.

※ 관련문서 : 소형저수조(주택) 직결급수 전환대상에 대한 현장조사 후 결과 제출

(계획설계과-1562, ’16.2.23)

주택의 소형저수조(신발생) 직결급수 전환 및 철거 추진 시행

(배수과-3305, ‘16.4.14)

1		추진경위

□ 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 추진실적 및 계획

(단위:개소)

구 분		계	’12년	’13년	’14년	’15년	‘16년
계		3,367	1,146	2,130	57	34	26
직결급수 전환 및 철거	전환주택	505	206	242	57	22	-
	미전환 주택	26	-	-	-	-	26
미사용 물탱크 철거		2,828	940	1,888	-
사업비		462 백만원	165 백만원	258 백만원	24 백만원	15 백만원	15,600 천원

※ ’14년까지 소형저수조 직결급수 전환 및 철거사업 완료

□ 직결급수 미전환 소형저수조(주택)에 대한 현장조사 실시

○ ’15. 12월 직결급수 미전환된 주택의 소형저수조(45개소) 보고에 따라 현장조사 실시

○ 조사기간 : ’16. 2. 23.(화) ~ 3.15.(화)

○ 조사결과 : 총 45개소(기완료11, 비대상8) 중 26개소 미전환주택

2		’16년 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 추진 계획

□ ’16년 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 추진

○ ’16년 추진목표 : 26개소

○ 사 업 비        : 15,600천원

- 추진목표

(단위 : 개소)

구별	추진 대상	그동안 직결로 전환하지 못한 사유								사업예산 (단위: 천원)
		수압 부족	관노후	관경 협소	직결전환가능	수요가 반대
						소 계	적극반대	비상용수사용	설득가능
계	26	9	6	5	0	6	6	0	0	15,600
강북구	8	3	3	1	0	1	1	0	0	4,800
노원구	6	0	1	2	0	3	3	0	0	3,600
도봉구	12	6	2	2	0	2	2	0	0	7,200

○ 세부 추진계획1

- 홍보방법 ┏ 안내 홍보물을 제작하여 우편발송

┗ 가구별 방문 설득 병행 실시

- 홍보시기 : ’16. 5월부터 사업완료시까지 지속적 실시

- 홍보내용 : 물탱크 사용시 청소비용 부담, 물탱크 청소 미실시 등 관리 부실시 이물질, 이끼 등 수질오염 가능성, 사업시행 방법 등을 친절히 안내하여 직결급수 전환 유도

○ 원인별 추진방법

미전환 원 인	추 진 방 법
- 수압부족(9개소)	가압시설 설치 후 전환 및 철거
- 관노후,관경협소(11개소)	옥내배관 교체 시 전환 및 철거
- 수요가 반대(6개소)	적극적인 맨투맨 설득 추진

○ 사업(공사) 시행 방법

- 급수공사 연간단가계약업체를 활용하여 공사시행

· 직결급수 전환 및 물탱크 철거, 폐기물 처리까지 모든 공사를 시행하여 시민 편의 제공

· 소형가압펌프(저소음 하향식) 설치 필요시

▷ 펌프는 건물주가 구매(반드시 KC인증 제품)토록 안내

▷ 설치공사 : 연간단가계약업체 (설치비용: 약16만원 소요 / 개소당)

- 월별 추진목표

(단위 : 개소)

구 분	계	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	26	4	4	4	4	3	3	2	2
강북구	8	1	1	1	1	1	1	1	1
노원구	6	1	1	1	1	1	1	-	-
도봉구	12	2	2	2	2	1	1	1	1

- 구별 업무책임 담당자 지정

구 분	담 당 자	책임 담당지역	비고 (총괄)
강북구	박상권	인수동, 송천동, 삼양동, 미아동	장병철
	정성식	수유동
	이한수	우이동
	정재필	번동, 송중동
노원구	김종필	하계동	구자광
	남상욱	상계동
	남현우	월계1동, 공릉1동
	유강현	월계2·3동, 공릉2동
도봉구	강대유	도봉동, 방학동
	이준규	쌍문동, 창동

□ 행정 사항

○ 홍보(우편발송 등) 실시  : ’16. 5월 부터 ~ 지속적으로 실시

○ 직결급수잔환 및 철거 실적 보고 : 본부에 매월 5일까지 (급수운영과 담당자)

○ 직결급수 전환후 GIS에 현황자료 입력 실시 (지역 담당자)

- GIS 시스템 등록위치 : 행정지원-급수설비관리-직결급수관리

- 2012년 ~ 2015년 직결급수전환 실적자료 GIS 시스템 등록

붙 임 : 1. 직결급수 전환사업 홍보문(안) 1부.

2. 소형저수조(주택) 직결급수 전환 및 철거 관리대장(북부) 1부.  끝.