서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약 의뢰[오리로 확장 등 개선방안 검토용역]

우리과에서 추진중인 기술용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고, 이에 대한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명：오리로 확장 등 개선방안 검토용역

- 계약업체 : 에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학

- 계약기간 : 2015. 7. 30. ~ 2016. 4. 26.

나. 설계변경(정산)내역

구분	당초금액	변경금액	증·감액	비고
계약금액	23,528,000원	22,028,000원	감) 1,500,000원

다. 변경사유 : 실정산에 따른 설계자문비 감액

라. 예산과목

[도시개발특별회계] 안전총괄본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충,                  오류동 오리로 확장, 시설비(401-01)

붙임   1. 관련방침 1부.

2. 변경설계서(정산) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
★주무관	최재훈		간선도로계획팀장	오재영		도로계획과장	전결 04/26 하종현
협조자
시행	도로계획과-5802	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110,10층	/
전화	02-2133-8080	/전송	02-2133-0763	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	대시민공개