서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울시복지재단 대표이사
(경유)
제목	2016년 종합사회복지관 기능보강사업 변경 검토 요청

1. 송파구 복지정책과-10264(2016.4.22.)와 관련된 사항입니다.

2. 2016년 송파구 가락종합사회복지관 기능보강사업으로 선정된 사업에 대해 변경 요청이 있어 검토 요청하니, 조속한 시일내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 송파구 가락종합사회복지관

나. 당초사업 : 석면텍스 제거

다. 변경사업 : 방염 실크벽지 시공

라. 총사업비 : 19,840천원(총사업비 1,870천원 감액)

※ 변경 세부내역

(단위 : 천원)

변경전					변경후
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
계	21,710	9,770	9,770	2,170	계	19,840	8,928	8,928	1,984
지하 대강당 석면텍스제거 및 강당 환경개선	21,710	9,770	9,770	2,170	지하 대강당 방염실크벽지 시공 및 강당 환경개선	19,840	8,928	8,928	1,984
◎ 변경사유 - 석면텍스 제거 공사의 법령강화로 기능보강 신청시점(2015년)과 달리 석면 제거 전문업체 선정 및 석면제거 비용이 3배 이상 추가 발생하여 지원확정 예산(21,710천원)으로 진행 불가능 - 따라서 석면텍스 제거 공사를 방염실크벽지 시공으로 사업을 변경하여 석면의 영향을 완화하는 방안 검토

※ 문  의 : 송파구 복지정책과 기능보강사업 담당 양준형 주무관(02-2147-2687)

송파구 가락종합사회복지관 담당 심혜영 팀장(02-449-2341)

붙  임 : 1. 기능보강사업 변경 검토의견서(송파구)

2. 기능보강사업 변경신청서

3. 사업변경사업 견적서  끝.

	서 울 특 별 시 장
	임미란		시설지원팀장	오은미		복지정책과장	04/26 엄의식
협조자
시행	복지정책과-8117	(		)	접수		(		)
우	0452	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개