서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 (폐기물처리용역)

1. 버스정책과-7416호(2016.4.22.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 “2015년 가로변정류소 이용환경개선공사 폐기물 처리용역□에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기하고자 합니다.

가. 용역계약 개요

계약건명	계약금액	계약자	준공기한
2015년 가로변 정류소 이용 환경개선 폐기물처리용역	￦8,380,000	주식회사 수도권환경	2016.4.30

나. 준공기한 연기내역 : 당초)2016.4.30.→변경)2016.5.20

다. 귀책사유 : 서울특별시

붙임 1. 준공기한 연기방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 계약상대자 준공기한 연기동의서, 합의각서 각1부.  끝.

	버스정책과장
★주무관	이오수		정류소관리팀장	代이오수		버스정책과장	04/26 이상훈
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	버스정책과-7648	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	부분공개(6)