문서번호	방재시설부-6076
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	04/26 임춘근
협조	광역도로과장		진재섭
	주무관		김상도

- 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 -

부천시구간 조경변경사항 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 -

부천시구간 조경변경사항 실정보고사항 검토보고

『남부순환로~오정대로간 도로개설공사』중 부천시구간내 조경공사   관련하여 부천시와 업무 협의한 결과(가로수, 띠녹지대, 교통광장,    교통섬 수종변경)를 공사에 반영한 검토 보고임.

※ 관련공문 : 실정보고(부천시 구간 조경 변경사항)/천호수 제2016-132호)

공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로삼거리간 도로개설공사

○ 사업기간 : 2010.09.29. ~ 2016.06.30.

○ 규    모 : 도로개설 폭 8차로, 연장 1,230m

○ 도 급 비 : 10,860백만원(조경 990백만원)

○ 시 공 사 : 보훈종합건설㈜

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

추진경위

○ 2015.09.14. : 부천시 의견 반영 요청(오정구→도기본)

○ 2016.02.24. : 부천시 의견 반영 회신(도기본→오정구)

○ 2016.03.02. : 조경협의 부천시 의견 반영요청 회신에 추가의견

(오정구→도기본)

○ 2016.03.17. : 부천시 의견 반영 협의결과 통보(도기본→감리단)

감리단 실정보고 내용

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
1. 수목이식공
스트로브잣 이식(h=3.0)	68	8	△60	적정
스트로브잣 이식(h=6.0)	-	47	47	〃
느티나무(R24～30) 이식	-	5	5	〃
느티나무(R18～20) 이식	11	-	△11	〃
모감주나무(R14～16) 이식	2	2	-	〃
모감주나무(R12) 이식	-	2	2	〃
단풍나무(R22) 이식	2	2	-	〃
단풍나무(R13～18) 이식	-	16	16	수형불량 2주 제외
아그배나무(R10) 이식	2	2	-	적정
매화나무(R6～8) 이식	-	3	3	〃
대추나무(R10) 이식	-	2	2	수형불량 제외
산딸나무(R15) 이식	-	2	2	〃
피나무(R18～30) 이식	-	5	5	〃
벚나무(R24～30) 이식	-	4	4	수형불량 제외
쥐똥나무(H1.0) 이식	710	710	-	적정
병꽃나무(H1.0) 이식	670	670	-	〃
2. 수목 식재공				〃
곰솔(해송)	30	60	30	〃
소나무(장송)	-	16	16	〃
스트로브잣	140	69	△71	〃
느티나무(R12)	50	50	-	〃
느티나무(R15)	-	91	91	〃
매화나무	50	50	-	〃
복자기	27	-	△27	〃
산수유	40	25	△15	〃
꽃복숭아 나무	-	66	66	〃
왕벗나무	93	-	△93	〃
낙상홍	600	1,200	600	〃
병꽃나무	3,000	900	△2,100	〃
자산홍	3,450	3,300	△150	〃
조팝나무	4,200	2,160	△2,040	〃
흰말채나무	2,400	2,250	△150	〃
맥문동	-	13,000	13,000	〃
꽃무릇	-	1,900	1,900	〃
잔디(평떼)	1,243M2	367M2	△876	〃
잔디(줄떼)	-	6,614M2	6,614M2	〃
멀칭재	-	1,018M2	1,018M2	〃
채널조형물	-	1개소	1개소

감리단 검토 의견

○ 현  황

- 본대상지 종점부는 행정구역상 부천시에 포함되는 구간으로 부천시          관문적 역할을 감안하여 부천시 진입부로서 랜드마크적 요소도입           및 이미지부여를 위해 식재수종 및 특화시설을 요구한 사항으로 발주처와           협의한 사항을 주요내용으로 반영.

- 도로개설공사로 저촉되는 기존수목 이식에 따른 실제 수종, 규격, 수량          내용 반영

○ 부천시 요구사항

- 가로수 당초 왕벚나무→느티나무 식재

- 띠녹지내 바크포설 및 기존 잔디 맥문동 변경

- IC구간 부천시목 도입 및 곰솔, 스트로브잣 규격 상향

- 교통섬내 장송 식재 및 회양목, 꽃무릇 추가

- 진입녹지대 판타지아 부천 조형물 및 하부섬유조명 추가

- 관련근거: 오정구 경제교통과- 1409호(2015. 09. 14)

○ 문 제 점

- 부천시 의견반영으로 인한 혼잡한 공간이 되지 않도록 교목, 관목의          수량의 및 규격조정이 필요하며 좁은 띠녹지 폭원으로 인한 가로수          규격 조정이 필요

- 최초 설계시와 이식공사 투입시점과 시차발생 및 현장여건 변화로         인한 이식목의 수종, 규격, 수량이 일부 맞지 않으므로 이에 따른         조정이 필요한 것으로 판단됨.

○ 대 책

- 당초 가로수는 왕벚나무(B15)이나 부천시의견에 따라 느티나무 수종          으로 식재토록하고 띠녹지 폭원(O.95M)협소로 느티나무 (R15)으로          하향조정하여 식재토록 함이 타당함.

- 당초 협의사항 반영으로 무리한 수목 배식이 되지 않도록 수목 밀도의          적정성을 확보토록 배식물량을 조정하고 이식수목은 수종, 규격, 수량          확인 후 내역에 반영토록 함.

개략공사비 내역

(단위 : 천원)

구 분	공사금액		증․감액	비 고
	당 초	변 경
수목이식 및 식재	447,258	653,338	206,080
직접공사비	447,258	653,338	206,080
제경비	124,014	173,752	49,738
공급가액	571,272	827,090	255,818
부가세	57,127	82,709	25,581
도급 공사비	628,400	909,800	281,400

검토결과

○ 부천시 오정대로구간 연결된 가로수가 느티나무로 왕벚나무에서 느티        나무로 변경하여 경관을 향상

○ 띠녹지내 바크포설 및 잔디를 맥문동으로 변경 요구사항 반영

○ 교통섬내 장송, 맥문동, 꽃무릇, 회양목 식재 요구 반영

○ IC 녹지대 수목 변경사항에 대하여 예산을 절감할 수 있도록 신규         수종(화살나무)을 일부 제외하였고 유지관리 용이하도록 관목류,         지피류 식재를 최소화 함.

○ 조형물(“판타지아 부천”) 설치 사항은 부천시방향 1개소만 반영

○ 지장수목에 대하여 관련기관 부천시(오정구청)와 협의 후 협의조건에        따라 지정장소에 수목이식 작업을 시행하기로 한 사항으로 공사의 시급성을        감안하여 우선 시공하고 추후 설계변경토록 실정보고 사항을 승인처리 함.

○ 신규 일위대가는 도시기반시설본부 품셈을 적용하여 수정한 후 설계        변경 소위원회 심의를 득한 후 심의결과에 따라 추후 설계변경에 반영        하도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 관련공문 1부.      끝.