문서번호	설비부-6609
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 04/27 권오식
협조

‘개포디지털 혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사’

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2016. 04.

도시기반시설본부

(설비부)

‘개포디지털혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사’

관급자재 납품기한 연기 검토보고

‘개포디지털혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비 공사’ 관련, 관급자재 납품기한 연기를 위한 검토 사항을 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 개포디지털 혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사

❍ 위    치 : 강남구 개포로 416(개포동 153,153-1)

❍ 공사규모 : 본관(지하1층/지상5층), 신관(지하1층/지상5층)

체육관(지상2층), 수위실(지상1층), 연면적 6,078㎡,

❍ 주요설비 : 냉난방, 공조, 위생, 자동제어, 소방 설비 등

❍ 공사기간 : 2016. 01. ~ 2016. 09.

❍ 공 사 비 : 1,489백만원(도급 634, 관급 855)

2		관련근거

❍ ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 개포씨엠-69(2016.4.26.)

- 관급자재 구매설치 장비(공기순환기외2종) 납품기한 연기 요청 검토결과 보고

3		검토보고내용

❍ 관급자재 납품기한 연기내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약업체	계약금액(원)	납품 기한		비 고
				당 초	변 경
공기조화기	121620492300 (00157054200)	정선엔지니어링(주)	127,792,000	2016.04.30.	2016.09.30.	· 계약 금액 변경 없음
송풍용팬	121620492200 (00148086701)	〃	15,940,000	2016.04.30.	2016.09.30.	〃
공기순환기	121620491800 (00158103802)	은성화학(주)	117,181,100	2016.04.30.	2016.09.30.	〃

❍ 연기 사유

- 선행 공종 준공 일정상 관급자재 납품 시기 미도래

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 감리단 검토 의견

- 선행 공종의 준공 일정상 납품 업체의  납품기한 연기 요청 내용이 적정하다고   판단됨.

4		보고자 의견

❍ 감리단의 검토 보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게        적기에 납품될 수 있도록 납품 기한을 연기 조치하고자 함.

따로 붙임 : 관급자재 납품기한 연기 관련 문서 1부.  끝.