투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영기획과장
(경유)
제 목	납품기한 연기 요청(녹지대 정비공사 휀스 조달구매)

1. 시설개선과-4328(2016.4.27.) 납품기한 연기 보고(녹지대 정비공사 조달구매)와 관련입니다.

2. 잠실종합운동장 녹지대 정비공사 시행 중 납품연기 사유가 발생하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

■ 요청사항 (납품기한 연장)

계약명	계약자	계약금액(원)	연기사유	준공기한
				변경전	변경후
잠실종합운동장 녹지대 정비공사 관급자재 구매(휀스)	주식회사 우림에프엔씨 ******	********** (수수료 포함)	공사에 포함된 부지정리 등이 완료되지 않아 공사 준공일까지 납품기한 연기	2016.4.30	2016.5.18

붙  임 :  방침서 1부.  끝.

	시설개선과장
주무관	안현미		주무관	이영교		시설개선과장	04/27 최용덕
협조자
시행	시설개선과-4341	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장	/
전화	2240-8791	/전송	2240-8777	/	ahmland@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)