투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울과학관건립공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	실정 보고사항 승인 통보(서울과학관 전기공사 설계변경)

1. 정과감 제16-151(2016.4.22.)호와 관련입니다.

2. 서울과학관 전기공사 설계변경 실정보고건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내용

구 분	승 인 사 항	소요예산(천원)
계		증)41,014
감액요인	- 한전 개폐기 위치 변경에 따른 전기 인입공사 물량 감소 등	감)12,679
증액요인	- 기계실내 전동기제어반 위치 변경에 따른 간선공사 물량 증가 - 각 실 천정높이 변경으로 조명등기구 배관배선 물량 증가 - 시립과학관 운영부서 요청에 따른 소방감지기 등 물량 증가	증)53,693
감리의견	- 변경사항 적합하여 설계변경 승인 요청

붙임 : 설계변경 승인요청서(공문) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	김창균		설비부장	04/27 권오식
협조자
시행	설비부-6681	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개