문서번호	시설과-2718
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장
이강호	04/27 공헌구
협 조
	주무관		오창호
	주무관		박도원

『서울대공원 식물표본 전시실 리모델링공사 실시 설계용역』  용역기간 연기 검토 보고

2016.  4.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울대공원 식물표본 전시실 리모델링공사 실시 설계용역』

용역기간 연기검토 보고

우리 대공원에서 시행중인「서울대공원 식물표본 전시실 리모델링공사 실시 설계용역」과 관련하여 용역기간 연기 신청서가 제출되어 검토 후 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 서울대공원 식물표본 전시실 리모델링공사 실시 설계용역

□ 용역기간 : 2016. 3. 16 ~ 2016. 4. 29

□ 용역금액 : 금9,980,000원

□ 시 공 자 : ㈜예종합건축사사무소 대표 김 상 헌

Ⅱ		연기사유

□ 근거

○ 설계용역 실무자 회의( ‘16. 4. 11. 15:00)

○ 식물표본 전시실 리모델링공사 관련 협조 요청(조경과-2157호, ‘16. 4. 27)

○ 식물표본 전시실 실시 설계용역 기간 연장 요청(예건축 2016 - 427호)

□ 사유

○ 전시실 환기시설 및 각 실 냉·난방설비 신설로 인한 용역기간 부족

○ 세부사항

- 배관이 노후된 기존 난방시설 시설은 철거(철거가 어려운 부분은 폐쇄)

- 환기가 어려운 1층 전시실 2개소에 전열교환기(공기순환기)설치

- 1~2층 전체 실(복도 제외)에 EHP 냉·난방기 설치

Ⅲ		검 토 의 견

□ 추가 공정으로 용역기간을 연기하는 것이 타당함

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 용역기간 연기

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	‘16. 3. 16 ~ ’16. 4. 29	‘16. 3. 16 ~ ’16. 5. 19	20일간

Ⅳ		조 치 의 견

□ 원할한 사업 추진을 위해 상기와 같이 용역기간을 연기코자 함

붙임 : 관련 공문 2부. 끝.