투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청(중랑천 초안산앞 보행교량)

1. 재무과-9258호(2016. 2.29.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계용역

나. 용역개요 : 보행교량 설치 폭4.5m, 연장191m

월계역 입구 교차로 주변도로 구조개선 (경원선 철도교 하부)

다. 계 약 자 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜경진에지니어링

라. 변경계약 내역

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	총차	277,869,000	277,869,000	-	내역변경 없음
	1차	277,869,000	277,869,000	-	내역변경 없음
계약기간	총차	2015. 9.15. ~ 2016. 4.29.	2015. 9.15. ~ 2016. 7.29.	증)3개월	용역기간 연장
	1차	2015. 9.15. ~ 2016. 4.29.	2015. 9.15. ~ 2016. 7.29.	증)3개월	용역기간 연장

마. 예산과목 : 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 중랑천 초안산앞 보행교량 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 전기설계(가로등, 경관조명)를 위한 준공기한 연기

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 예정공정표(변경) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		토목설계과장	여용석		토목부장	전결 04/28 김영수
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	토목부-8529	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 (무교동) 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개