투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	전면책임감리용역 설계변경(총차5회, 3차1회) 계약의뢰

우리 부에서 시행하는 『경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차5회,3차1회) 계약의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경의선숲길,경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역

나. 계약금액 : 1,691,180,000원 (3차 계약금액 : 300,380,000원)

다. 용역기간 : 2013. 11. 27 ~ 2016. 6. 30 (3차 용역기간 2016.01.01.~2016.06.30)

라. 용 역 사 : ㈜유신 & ㈜건일엠이씨

마. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
계약 기간	전체	2013.11.27.~2016.06.30	2013.11.27.~2016.06.30	변경없음
	금회(3차)	2016.01.01.~2016.06.30	2016.01.01.~2016.06.30	변경없음
계약금액	전체	1,691,180,000원	1,701,710,000원	증)10,530,000원
	금회(3차)	300,380,000원	310,910,000원	증)10,530,000원

바. 설계변경 사유

- 전문가 자문비 반영, 감리용역 물가변동(제2회 반영)

사. 예산과목 : 생활권 공원확충,도심공원 확충,경의선숲길 공원조성, 시설비 및 부대비, 감리비

붙 임 : 1. 설계변경시행방침서 1부.

2. 설계변경내역서(총차5회, 3차1회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	04/28 임춘근
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-6273	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	부분공개(6)