함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)］ -설계변경(2차)

우리 사업소에서 시행중인 “2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)

○ 주요 변경물량

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	노후밸브교체	235	77	감) 157
	원형 및 중형변실 정비	47	77	증) 30
	철개교체, 굴상 및 굴하	32	37	증) 5
	시설물보수 및 환경정비	1	1	-

○ 계약기간 : 2015.06.18 ~ 2016.06.30

○ 도급비 변경내역

- 당   초 : 금557,643,130원

- 변경 후 : 금557,643,130원 (변동없음)

○ 계약업체 : 산희건설㈜    대표 이종석

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2016. 4. 28(목) 14:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설6급 이승완, 시설7급 강대유, 시설7급 유광창, 시설7급 이한수

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	04/28 이계환
협조자	주무관	강대유		주무관	이한수		주무관	유광창
지방시설사무관대우	이승완
시행	급수운영과-8683	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)