문서번호	원무과-7083
결재일자	2016.4.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
박재균	조선행	代박준영		04/28 나백주
협 조
	서무팀장		박준영
	주무관		이연진

병원입구 주차장 전면도장 추진계획 보고

2016. 4

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

병원입구 주차장 전면도장 추진계획

우리병원 입구 주차장 전면부에 도장탈색 및 먼지 물 흐름 등 미관상 지장이 있어 외부도장을 실시하여 환자 및 방문객에게 쾌적한 병원이미지로 개선하고자 함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 병원입구 주차장 전면도장 공사

위    치 : 서북병원 입구 주차장 전면 외부

공사기간 : 착공일로부터 9일

주요공종

1. 주차장 전면 외부 도장

❍ 바탕 만들기 작업 : 물 흐름자국 청소, 면 긁기 및 퍼티

❍ 도장 작업 : 수성페인트 칠 작업

❍ 기타 작업 : 마무리 손보기 및 현장정리 둥

2. 주차장 입구 가림막(WOOD) 휀스 보수 및 도장

❍ 바탕 만들기 : 우드휀스 일부철거 및 보수, 면 긁기 및 퍼티

❍ 도장 작업 : 스테인 칠 작업

❍ 기타 작업 : 마무리 손보기 및 현장정리 둥

현장사진

Ⅱ		시 행 방 법

계약방법 : 1인 견적에 의한 수의계약

❍ 관련법령 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법시행령 제30조 제1항에 의한 수의계약

계약업체 : ㈜디자인플랜, 대표 정하운

❍ 주 소 : 서울시 강남구 논현동34-24, 창성빌딩 201호

Ⅲ		소 요 예 산

소요금액 : 8,997,000원

예산과목 : 청사시설 운영관리, 공공운영비

따로 붙임 : 견적서 및 외부도장 계획(안) 1부.  끝.