투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	「세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사」건설사업관리용역 변경계약 의뢰

1. 우리 본부에서 시행중인「세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사 건설사업관리용역(감독권한대행)」에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차 및 1차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사 건설사업

관리용역(감독권한대행)

나. 용역기간 : 2016.03.24 ~ 2017.08.23

(1차 : 2016. 03. 24 ~ 2016. 09. 23)

다. 계약금액 : 1,599,799,000원(1차 : 375,200,000원)

라. 계 약 자 : ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소외 1개사

마. 계약변경 내용

구 분		변경 전	변경 후	비 고
용역기간	총차	2016.3.24~2017.8.23	변경 없음	․
	1차	2016.3.24~2016.9.23	2016.3.24~2016.9.15	감 8일
계약금액	총차	1,599,799,000원	변경 없음	․
	1차	375,200,000원	498,700,000원	증 123,500,000원

바. 예산과목 :  지속가능한 역사문화도심구현/ 도심상가 활성화/ 도심

산업활력촉매제, 세운상가군 재생사업/ 감리비(401-02)

붙임  1. 보고서 사본 1부.

2. 건설사업관리용역 배치변경 요청서 1부.

3. 변경 계약 총차배치표 및 산출내역서 사본 1부.

4. 변경 계약 1차배치표 및 산출내역서 사본 1부

5. 업체합의서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	채종철		건축총괄과장	박범규		건축부장	04/29 안재혁
협조자	지방시설사무관대우	신현성		계약2팀장	홍연화
시행	건축부-5646	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미엄 플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2606	/전송	02-3708-2659	/	time@seoul.go.kr	/	부분공개(5)