함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	'16년 노후 유량계 및 전송반 교체사업 검토 요청(변경)

1. 본부 누수방지과-3369(’16. 3. 31.)호와 관련입니다.

2. ’16년도 노후 유량계 및 전송반 교체사업과 관련하여, 사업대상을 아래와 같이 변경 요청하오니 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내역   (※사업비 증․감없음)

변경전			변경후
구분	사업대상	설치년도	구분	사업대상	설치년도
유량계 (2)	NBM-28	2002	유량계 (2)	NBM-28	2002
	독산(배) 자연	2003		NBM-3	2005
전송반 (2)	노량진-상도	2001	전송반 (1)	NBM-3	2005
	독산(배) 자연	2003

나. 변경사유

‣ NBM-3 : 내구연한 경과에 따른 오작동 발생 빈번으로 교체 시급

(최근 3개월간 유량 미전송 6회, 유량값 보정 12회)

‣ 독산(배) 자연 : ’14년 주요부품(메인보드) 교체 완료

‣ 노량진-상도 : ‘NBM-3’ 우선 교체후, ’17년 사업 추진.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김형구		기전팀장	오준식		시설관리과장	04/29 우종근
협조자
시행	시설관리과-11449	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소	/
전화	02-3146-4618	/전송	02-3146-4639	/	goos@seoul.go.kr	/	대시민공개