투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	재사용플라자 건립공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 김 일 영 귀하
(경유)
제 목	「재사용플라자 건립공사」휴일작업 승인 알림

1. PC재사용16-176(2016. 4.27.)호와 관련입니다.

2.『재사용플라자 건립공사』휴일작업(2016년 5월) 승인하오니 건설사업관리 업무지침서등 관련규정 및 용역계약 내용을 준수하여 휴일작업에 따른 안전관리, 공정관리, 품질관리등 건설사업관리업무 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 재사용플라자 건립공사 휴일작업(토요일,일요일,공휴일) 및 야간작업은 계약상대자〔동원건설산업(주),(주)서우건영〕가 공사계약 사항 이행을 위한 부진공정만회대책으로 인력, 자재, 자금등을 투입하여 실시하고 있는 사항임으로 향후 간접비등 행정소송이 제기되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	04/29 안재혁
협조자
시행	건축부-5619	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)