문서번호	보행자전거과-4849
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보행시설팀장	보행자전거과장
이석연		박찬규	04/06 이방일
협조
	교육훈련팀장		박은경

’16년 보행자우선도로 자문단 구성 및 운영계획

2016. 4.

도시교통본부

(보행자전거과)

’16년 보행자우선도로 자문단 구성 및 운영계획

’16년 보행자우선도로 사업에 대해 맞춤형 설계 및 사회적 인식 제고를 위해 보행분야 전문가로 자문단을 구성·운영하여 사업의 효율성을 높이고자 함

1		사업개요 및 추진경위

□ 사업개요

○ 사업대상 : 중랑구 망우로55길 등 생활권이면도로 20개소

○ 사업기간 : ’16. 2. ~ 12.

○ 사 업 비 : 2,200백만원(시비지원액)

○ 사업내용

- 보행자와 차량이 혼합된 공간에서 스탬프 포장기법, 노면표시 최소화, 보차도 단차제거 등을 통해 차량이 보행자를 의식하도록 여건 조성

□ 그간의 추진경위

○ ’16. 1. 29. : ’16년 보행자우선도로 사업 추진계획 수립

○ ’16. 3.  7. : 설계용역 발주 검토

- 자치구 자체설계 후 서울시 심의하여 공사비 배정

○ ’16. 3. 16. : 사업대상지 선정

- 35개소 자치구 공모대상 중 20개소 선정

○ ’16. 4.  4. : 설계비 배정

- 18개 자치구, 168백만원 배정

2		자문단 구성·운영 계획

□ 구성·운영 방향

○ 설계원칙이 충분히 반영되어 수준 높은 설계가 이루어질 수 있도록 설계단계 사업대상지별 자문실시

○ 보행자우선도로의 도입취지와 설계원칙에 부합하는지를 확인하기 위한 설계(안) 최종심의를 통해 市 주도적으로 사업 진행

○ 기본적인 보행자우선도로 설계원칙을 공유하기 위한 담당자 교육 시행

□ 구성·운영 계획

○ 운영기간 : ’16. 4. ~ 시공후 사후평가까지(필요시 수시)

○ 구    성 : 보행 관련 전문가 5명

연번	성명	소속	주 요 경 력	비 고
1	김승남	건축도시공간연구소 보건환경연구센터장	•건축도시공간연구소 부연구위원	’15년 보행자우선도로 설계 참여
2	오성훈	건축도시공간연구소 연구위원	•건축도시공간연구소 도시창조연구본부 연구위원	’13,’14년 보행자우선도로 설계 참여
3	김은경	파이카 E&C 생활환경교통연구소 소장	•중앙건설기술심의위원회 위원 •국토교통부 도시교통정책실무위원회 위원 •국토교통과학기술진흥원 평가위원 •수도권교통본부 설계자문위원회 위원	’13,’14년 보행자우선도로 설계 참여
4	김중효	도로교통공단 미래전략연구처 선임연구원	•경찰청 교통안전시설 지원연구과제 위원 •하남시청 교통안전시설 심의위원 •광진경찰서 교통안전시설 심의위원 •한국항공공사 안전시설 심의위원 •법원 안전시설 심의의원	’13,’14년 보행자우선도로 설계 참여
5	심한별	서울대학교 박사	•매핑 및 모델링 연구소 소장 •서울대학교 협동과정 도시설계 전공 강사	’13,’14년 보행자우선도로 설계 참여

○ 자문단 역할

<계획단계>

- ’16년 보행자우선도로 설계를 위한 원칙과 가이드라인 정립

- 자치구 담당자 교육을 위한 담당자회의 진행

<설계 및 시공단계>

- 자치구별 중간 및 최종 설계안에 대한 자문 진행

▸ 설계 기본방향 및 공사 추진방향 자문: 서울시 주관

▸ 추진과정에서 발생되는 민원 등 문제점 자문 : 자치구 주관

- 자치구별 쟁점 사항 발생 및 주민협의회와의 마찰 시 조정 역할 수행

- 자치구별 개별 자문 요청에 대한 응대

- 최종 설계안에 대한 심의

<사후평가 단계>

- 시공후 현장점검 및 사후평가 방향 자문

3		행정사항

□ 자치구 담당자회의 개최

○ 일    시 : ’16. 4. 19.(화) 14:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 서울시 서소문청사 후생동 3층 난국실

○ 참석대상 : 총23명(자치구담당자 18, 자문단 5)

○ 회의내용

- 보행자우선도로 설계 원칙 및 국내·외 사례 발표(건축도시공간연구소)

- 자치구별 보행자우선도로 계획(안) 발표

- ’16년 보행자우선도로 추진방향 및 자치구별 개선방안 자문

※ 교육시간 인정

- 근    거 : 상시학습제도 운영계획(인력개발과)

- 교육유형 : 기관 주관교육(직무관련 직장교육)

- 학습시간 : 3시간

- 인정방법 : 보행자전거과 일괄등록

□ 자문수당 지급

○ 자문회의 참석수당 지급

- 2016 예산편성 잠정기준 위원회 참석수당 적용

▸ 2시간내 10만원, 2시간 이상 15만원 지급

- 예산과목 : 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 보행환경개선사업, 보행친화도시 기반조성사업, 사무관리비(202-201-01)

4		향후계획

○ ’16. 4. 19.     : 자치구 담당자 회의(시, 자문단 운영)

○ ’16. 4. ~ 6.    : 설계 시행(자치구)

○ ’16. 5.          : 주민협의회 구성 및 설계결과 중간 검토(자치구)

○ ’16. 6.          : 설계결과 심의 및 보완(시, 자문단 활용 심의)

○ ’16. 7. ~ 9.    : 공사비 배정 및 공사 시행(자치구, 설계결과 심의통과시)

○ ’16. 10. ~ 12. : 사후평가 및 모니터링(시)