문서번호	조경과-6139
결재일자	2016.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		조윤래	05/02 이원영
협조

‘2016년 가로수 생육환경 개선사업’

대상지 변경승인 요청 검토보고

푸른도시국

(조경과)

‘2016년 가로수 생육환경 개선사업’

대상지 변경 승인 요청 검토보고

중랑구에서 ‘가로수 생육환경 개선사업’ 추진과 관련하여 사업 대상지 변경승인에 따른 보완자료를 제출하여 검토하고 보고합니다.

[관련대호 : 중랑구 공원녹지과-5470(2016.4.10.)호]

1		추진과정

❍ 2016. 2. 5. : 사업추진계획 수립 및 시달(서울시)

❍ 2016. 3.28. : 사업 대상지 변경 승인 요청(중랑구)

❍ 2016. 4. 4. : 변경 승인에 따른 보완자료 요구(서울시)

❍ 2016. 4.10. : 사업 대상지 변경에 따른 보완자료 제출(중랑구)

2		변경 요청사항

❍ 변경 대상지 내역

구 분		당 초	변 경
대 상 지		사가정로, 봉우재로	사가정로, 봉우재로, 용마산로, 답십리로
규 모	띠녹지 조성	1,000m	1,000m (사가정로 600, 용마산로 400)
	띠녹지 정비	-	300m(용마산로)
	가로수 메워심기	20주	8주(봉우재로, 답십리로)
	가로수 뿌리융기 정비	30주	26주(봉우재로, 답십리로)
	가로 보호판 정비	60주	-
사 업 비		금400백만원	금400백만원
토지현황		가로수 아래 유휴공지	가로수 아래 유휴공지

당초 대상지(봉우재로 - 띠녹지 조성)	당초 대상지(봉우재로 - 띠녹지 조성)

변경 대상지(용마산로 - 띠녹지 조성)	변경 대상지(용마산로 - 띠녹지 정비)

❍ 변경사유 : 당초 사가정로와 봉우재로의 가로수 아래 띠녹지를 조성을 추진하였으나 봉우재로는 상가밀집지역에 물품 상·하차가 수시로 이루어져 띠녹지 조성시 훼손과 다수의 민원발생이 우려되어 대상지 변경 승인 요청

3		보고자 의견

❍ 당초 띠녹지 조성 대상지인 봉우재로는 상가밀집지역으로 띠녹지의 훼손과 조성과정에 반대 민원이 예상되어

❍ 용마산로에 띠녹지를 조성하고 기존 볼록형 띠녹지를 오목형으로 정비하고자 것으로 띠녹지 조성 물량과 사업비 변경없이 대상지 변경을 승인하고자 함.

붙임 1. 대상지 변경 승인 요청서 1부.

2. 대상지 변경 요청에 따른 보완자료 제출서 1부.  끝.